투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	세외수입 고지서 발급[성동소방서 신축공사 건축사 감리용역- 지연배상금]

건축부-3537(2018.3.14.)“준공검사조서” 및 건축부-3494(2018.3.14.) 준공정산 검토보고와  관련 지연배상금을 부과 세외수입 고지서에 의거 잡수입 처리코자 합니다.

1. 사 업 명 : 성동소방서 신축공사 건축사 감리용역

2. 계 약 자 : **************

3. 계약기간 : 2017.11.16 ~ 2018.02.25

4. 계약금액 : 금14,250,000원

5. 산출금액 : 금277,880원

- 계약금액(14,250,000원)×지연일수(15일)×지체율(0.13%)=277,880원

업체명	대표자	사업자번호	소재지	고지액
*				********
**************	***	************	*******************	********

첨부 : 준공검사조서 및 준공정산결과보고서 1부  끝

주무관	이강준		경리과장	최정수		건설총괄부장	04/09 정진일
협조자
시행	건설총괄부-6510	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 빌딩 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2362	/전송	02)3708-2365	/	lgj1011@seoul.go.kr	/	부분공개(7)