문서번호	공원녹지정책과-5440
결재일자	2018.4.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원관리팀장	공원녹지정책과장
임성수		이용남	04/09 유영봉
협조
	예산3팀장		김대진

공원운영 관리체계 개선방안 기본계획용역 시행

2018. 4.

푸른도시국

공원녹지정책과

공원운영 관리체계 개선방안 기본계획용역 시행

공원 이용 서비스 수준향상을 위해 우리시 직영 공원에 대한「공원운영 관리체계 개선방안 기본계획 용역」을 아래와 같이 시행하고자 함.

※ 추진근거 : 공원녹지정책과-15803호(‘18.9.7) - 행정2부시장 방침 제207호

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 공원운영 관리체계 개선방안 기본계획 용역

○ 사업규모 : 시직영 21개 공원(8,951,455㎡)

○ 용역기간 : 2018. 5. ~ 2019. 4. (계약일로부터 12개월)

○ 용 역 비 : 200백만원(‘18년 150 / ‘19년 50 - 장기계속)

○ 주요내용

- 공원시설의 개선(정비) 방향 및 우선 사업대상지 선정(제안)

- 개별 공원의 운영관리 기본계획 등

○ 예산과목

- 공원 녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원 유지관리 및 이용활성화, 공원운영 관리체계 개선방안 기본계획 용역, 시설비(100-401-01)

□ 용역사 선정계획

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰

○ 낙찰자 결정방법 : 협상에 의한 계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조, 제44조

○ 입찰참가자격

- 조경 등 관련학과가 설치되어 있는 대학(교), 대학원 또는 환경, 도시분야 등 관련분야 연구를 목적으로 설립된 연구원 등 법인이 공동수급체(공동분담방식)를 구성하여 참여할 수 있음.(세부내용 : 붙임 입찰공고문 참조)

○ 계약상대자 선정 절차

제안서 사전공개	➡	입찰공고	➡	제안서 접수	➡	1차 심사	➡
추정가격 5천만원 이상		공고일로부터 20일		입찰서 접수 병행		발주부서의서류심사

2차 심사	➡	우선협상대상자 통보	➡	협상 및 계약체결
제안서평가위원회 심사		최고점수 업체		과업내용 및 가격 협상

○ 평가위원회 구성 및 심사(별도 세부계획 수립)

- 위원장을 포함하여 7명 이상 10명 이내로 구성하되, 공무원 위원수는 전체위원수의 1/3 이내로 한다.

- 참석위원수의 3배수 이상 예비명부 작성 후 입찰참가자가 직접 번호 추첨

- 기타 심사에 필요한 사항은 참석위원의 의견을 수렴하여 위원장이 결정

○ 제안서 평가 : 기술능력평가(90점) + 가격평가(10점)

- 행정자치부 예규 제19호(‘17.12.13.) ‘지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준’입찰가격 평점산식에 의함.

- ‘서울특별시 제안서평가위원회 설치 및 운영에 관한 규칙’ 준수

○ 협상 및 계약(내용협상 : 공원녹정책과, 가격협상 : 재무과)

- 선정된 협상적격자(총점 70점 이상)와 과업내용 협상

- 선순위 업체와 협상이 이루어지지 않을 경우 차순위 업체와 협상

- 협상금액 산출내역서 확인(공원녹지정책과) 후 계약 체결(재무과)

□ 추진실적

○ 2017.   9.   7. : 사업계획 수립(행정2부시장 방침)

○ 2017. 12.   7. : 기술용역타당성 심사 → 용역비 검토

○ 2018.   2. 22. : 전문가 사전 자문회의 → 사업방향 검토

○ 2018.   4.   2. : 용역발주 심의 → 과업내용서 검토

○ 2018.4.4.~4.9. : 제안요청서 사전공개(나라장터, 5일간)

□ 향후계획

○ 협상계약 입찰공고 의뢰 : 2018. 4. 10.

○ 입찰공고 기간 : 2018. 4. 11. ~ 4.30.(20일)

○ 제안서 접수 및 입찰등록 : 2018. 4.30.

○ 제안발표 및 심사 : 2018. 5. 3.(예정)

○ 협상 및 계약체결 : 2018. 5월 초

□ 행정사항

○ 평가위원회 참석수당 지급 : 105,000천원

- 150,000원(2시간 이상) × 7인 = 1,050,000원

○ 사무용품 및 다과 구입비 : 150천원

○ 예산과목

- 공원 녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원 유지관리 및 이용활성화, 시공원 유지관리 및 보수정비(도시관리특별회계), 사무관리비(205-201-01)

붙임  1. 방침서 1부.

2. 입찰공고문 1부.

3. 제안요청서 1부.

4. 과업내용서 1부.

5. 제한경쟁입찰 사유서 1부.

6. 청렴계약이행서약서 1부.

7. 산출내역서 1부.

8. 부당계약특수조건 점검표 1부.  끝.