투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(소)위원회 자문 의뢰【중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사】

우리부에서 시행 중인 『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사』에 대한 설계변경(소)위원회 자문을 아래와 같이 요청코자 합니다.

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

나. 규    모 : 보행교량 설치 B=4.5m, L=191m

다. 공사기간 : 2016. 04. 29 ~ 2018. 04. 28

라. 시 공 사 : ㈜한양산업개발

마. 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트

2. 설계변경소위원회 자문요청 내용

연번	자문안건	증·감액	비고
1	강교설치에 따른 가설벤트 추가설치	증 177,133천원
2	순성토,사토 운반 및 가도 변경	증 251,302천원

붙임 : 설계변경 소위원회 자문 요청서 1부(2건).  끝.

★주무관	노순재		교량건설과장	박용택		토목부장	04/10 김영수
협조자	주무관	남덕희		주무관	김동현
시행	토목부-6135	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/	fortuners@seoul.go.kr	/	대시민공개