문서번호	주차계획과-4469
결재일자	2018.4.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주차관리팀장	주차계획과장
박성수		김인호	04/10 이병수
협조
	실무사무관		이원창

노상주차장 설치대상 조사결과 보고

2018. 4.

주차계획과

노상주차장 설치대상 조사 결과보고

교통소통에 여유가 있는 도로의 측면을 주차공간으로 활용하기 위해 노상주차장 설치 가능지역을 발굴‧조사하고 그 결과를 보고드림

□ 근  거

❍ 도로 측면의 주차공간 확보방안 마련(시장요청사항 908번)

❍ 市 간선도로를 활요한 노상주차장 확충 계획 (주차계확과-299(‘18. 1.8.))

❍ 여유도로를 활용한 주차장 확보계획 보고 (주차계확과-3137(‘18. 3. 14.))

❍ 노상주차장 확보를 위한 현장조사 계획 (주차계확과-3372(‘18. 3. 20.))

□ 조사결과

❍ 현장조사

- 기    간 : ‘18. 3. 21 ~ 3.28(6일간)

- 조 사 자 : 이원장, 박성수 외 시설공단 직원 3명

- 대    상 : 139개소(25개 자치구)

❍ 조사결과

- 노상주차장 설치가능 개소 :  9개소  948면

구청	개소	합계	노상주차장		시간제허용구간
			일반형	거주자우선	주간	야간	주말
합계	9	948	948
영등포	1	106	106
광진구	1	34	34
동대문	4	632	632
은평구	2	166	166
강남구	1	10	10

□ 노상주차장 설치추진 계획

❍ 노상주차장 설치대상 ( 총 37개소 연장:12.79km 주차: 1,970면 )

구분	합계	노상주차장			시간제허용구간
		계	일반형	거주자우선	계	주간	야간	주말
면수	1,970	1,328	1,162	166	642	154	433	55
개소	37	22	13	9	15	4	8	3

- 자치구 신청 : 28개소 (9개 구청,  1,022면)

구청	개소	합계	노상주차장		시간제허용구간
			일반형	거주자우선	주간	야간	주말
9	28	1,022	214	166	154	433	55

- 자체조사  : 9개소 (5개 구청,  948면)

구청	개소	합계	노상주차장		시간제허용구간
			일반형	거주자우선	주간	야간	주말
5	9	948	948	-	-	-	-

❍ 노상주차장 설치 협의 추진

- 대 상: 34개소 (연장 11.49km 1,877면)

※ 중랑구 신청 3개소는 협의 완료되어 대상에서 제외

- 기 관: 18개 기관 (경찰서 10, 소방서 8)

❍ 추진일정

- ’18. 4. 11. : 자치구 의견조회 (대상지 추가신청은 4.13.까지)

- ’18. 4. 13. : 관련기관 협의 (경찰서 10, 소방서 8, 회신요청 기한 4.27.)

- ’18. 4. 30. : 관련기관 협의결과에 따른 노상주차장 설치 실시설계

- ’18. 5. 15. : 노상주차장 설치작업 개시

□ 행정사항

❍ 노상주차장 설치 추진

- 자치구 및 관련기관(경찰서‧소방서) 노상주차장 설치 협의

- 협의완료된 노상주차장 설치구간에 대한 설계 및 시공은 서울시설공단에서 추진,

시간제 주차허용구간 및 거주자 우선주차장은 해당 자치구에 통보·시행

❍ 노상주차장 발굴 지속 시행

- 관련기관 협의 및 주차장 설계시 설치 가능한 주차면수의 감소 예상

․ 교통상황, 지장물 등의 사유

- 노상주차장 확대설치 목표(2,500면) 달성을 위해 서울시설공단의 협조를 받아 지속적으로 노상주차장 발굴 추진

붙임  1. 노상주차장 설치대상 목록 1부

2. 자치구 노상주차장 설치 신청내역 9부