투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	건설사업관리용역 계약변경 의뢰(시립중랑노인전문요양원 증축공사)

1. 우리본부에서 시행 중인 ‘시립중랑 노인전문요양원 증축공사 건설사업관리용역’과 관련하여 다음과 같이 계약변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 시립중랑노인전문요양원 증축공사 건설사업관리용역

나. 계 약 자 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소(대표 김수호)

㈜갑인엔지니어링(대표 정길영)

다. 계약금액 : 753,635,700원 (1차 196,000,000원)

라. 용역기간 : 2017.12.18. ~ 2019.07.17.

마. 변경내용

(단위 : 원)

구 분		변경 전	변경 후	증·감
용역 기간	총 차	‘17.12.18~’19.07.17	‘17.12.19~’19.07.17	변경없음
	1 차	‘17.12.18~’18.07.31	‘17.12.18~’18.07.13	감)13일
계약 금액	총 차	753,635,700	753,635,700	변경없음
	1 차	196,000,000	196,000,000	변경없음

바. 변경사유

- 공사계획을 반영하여 건설사업관리기술자의 배치계획을 조정함에 따라, 용역기간이 변경됨

붙임  1) 건설사업관리용역 계약변경 검토보고서 1부.

2) 계약변경요청건 및 합의각서  각 1부.  끝.

	건축부장
★주무관	문성재		의료시설과장	이형재		건축부장	04/10 임인구
협조자	경리과장	최정수
시행	건축부-4913	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2616	/전송	02-3708-2659	/	msj2061@seoul.go.kr	/	부분공개(5)