문서번호	기술심사담당관-6138
결재일자	2018.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제66호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
오영진	류용열	김홍길		04/10 김준기
협 조
	기술관리팀장		代유현선
	토목심사팀장		조임남
	건축심사팀장		도태환

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(3월)

2018.  4.

서울특별시

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(3월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 「외부전문가 기동점검단」의 `18년 3월 중 활동 결과에 대하여 보고 드림

1. 점검개요

점검일자	2018. 3. 6.(화)	2018. 3. 13.(화)	2018. 3. 20.(화)	2018. 3. 27.(화)
공 사 명	양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사	성산대교 북단 성능개선공사	서울 마곡중앙광장 조성공사	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사
사업부서	도시기반시설본부	도시기반시설본부	서울주택도시공사	도시기반시설본부
공사기간 (공정률)	`16.12.05. ~ `19.08.04.(51%)	‘17.03.23. ~ ’18.12.22.(38%)	‘16.03. ~ ’18.05. (62%)	‘16.04.01. ~ ’20.03.05.(30%)
점검자	· 창건이앤씨 박지배 · 유케이이엔씨 유병률 · 진우엔지니어링 안삼현 (직원 : 기술관리팀 2)	· 제일엔지니어링 오해진 · 영진엔지니어링 김상석 · 동우기술단 김영환 (직원 : 토목심사팀 3)	· 유탑엔지니어링 이세웅 · 한국재난연구원 권회구 · 한국가설협회 김곤묵 (직원 : 건축심사팀 3)	· 한맥기술 박윤규 · ㈜제일엔지니어링 김희욱 · ㈜대한이앤씨 박주경 (직원 : 기술관리팀 2)

2. 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- ONE-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비와 인력투입현황 관리여부

- 현장반입 건설기계 임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 토공 및 가시설 설치상태 등 안전관리 실태

- 동바리 및 비계 설치 및 유지관리실태 점검

- 흙막이 가시설의 설치 및 관리실태 점검

❍ 구조물에 대한 품질․공정관리 등 시공관리

- 시공상세도 등 설계도면 작성상태 및 시공계획 수립여부

- 공사 시공 및 품질관리 상태 점검

3. 점검결과

□ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	53	38	10	5
양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사	11	9	1	1
성산대교 북단 성능개선공사	16	14	-	2
서울 마곡중앙광장 조성공사	19	10	8	1
올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	7	5	1	1

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

- Raker 가시설 스티프너 설치 누락부 및 H형강 손상부에 대한 보강 조치 요함.(양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사)

- 코너구간 버팀보 띠장과 앵커 띠장이 일체화 될 수 있도록 용접 등 조치 요함.(양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사)

- 저류시설 코너부 CIP말뚝 캡 콘크리트 미세균열 진행성 여부에 대한주기적인 점검 요함(양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사)

- 가교 구조물 계측계획(특허공법 적용부재 변형상태 등)이 누락되고, 가교 점검시설이 없으므로 조치 필요.(성산대교 북단 성능개선공사)

- 고수부지(둔치)상에 설치된 가교 기초부가 토사로 되어 있어 홍수시 세굴 우려 있으므로 세굴방지 대책(포장 등) 검토 필요(성산대교 북단 성능개선공사)

- 호안부에 설치된 가교 기초가 한강물과 직접 접할 수 있으므로 호안공 등의 설치 검토 요함.(성산대교 북단 성능개선공사)

- 구조검토 시 교각에 적용한 유수압 투영면적은 강관폭에서 벤트 투영면적으로 재검토 요함.(성산대교 북단 성능개선공사)

- R-J2교 P2~P4의 E/A 1단 설치구간 sheet pile의 근입깊이(도면상 6.0m) 확보여부 및 가시설 안정성에 대하여 재검토 필요.(올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사)

- 올림픽대로 인접 Sheet Pile 인발 시 주변지반 변형이 발생하지 않도록 정밀시공 할 것.(올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사)

품질관리 분야

- 부력방지 앵커 시공부의 물고임에 대하여 몰탈 시공전 건조 조치 요함.(양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사)

- 철근 배근 관리 미흡.(서울 마곡중앙광장 조성공사)

· 옹벽철근 일부 피복두께 미확보

→ Con`c 타설전 스페이서 고정 확인 후 타설

· 기둥 철근 콘크리트 피복두께 과다

→ 도면, 시공상세도 참조하여 피복두께 유지요함

· 기둥 철근 순간격 미준수

→ 철근 순간격 유지·수정 요함

· 기둥 철근 이음위치 및 이음길이 부적정

→ 시공상세 및 공사시방서에 따라 시정요함

- R-J P2 기둥띠철근 갈고리 정착각도(135°) 적용여부를 검토하고 필요시 시공상세도 작성하여 시공 요함.(올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사)

기타 관리 분야

- 집중폭우시 가시설 내부 우수 유입이 우려되므로 가시설 배면에 가수로 설치 등 월류 사전 방지대책 마련할 것.(올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사)

4. 조치 내용

□ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 전달하여 즉시 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 시정 및 현장관리토록 공문으로 통보

붙임 : 점검 주요 지적사례 1부.  끝.