＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	낙산 및 수유6배수지 건설공사 건설사업관리단
(경유)
제 목	공정율 부진에 따른 대책수립 지시(낙산배수지 건설공사)

1. 낙산배수지 건설공사의 공정율이 계획공정 대비 50%(2018. 4. 11. 현재)로 매우 부진한 실정으로 향후 공정관리에 많은 차질이 예상됩니다.

2. 따라서 건설사업관리단에서는 시공사에 공정율 부진사유 분석 및 근로자 안전확보를 고려한 부진공정 만회대책 및 만회공정표를 수립 지시하고 그 결과를 제출받아 검토하고 2018. 4. 18.(수)까지 보고하여 주시기 바랍니다.

3. 또한 “건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제64조(공정관리)”에 의거 당 현장의 월간 및 주간상세공정표를 작업착수전 시공사로부터 제출받아 검토하고 보고하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	차승현		시설과장	04/11 송병욱
협조자	주무관	윤걸
시행	시설과-3407	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)서울시 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1496	/전송	02-3146-1529	/	201107260@seoul.go.kr	/	대시민공개