투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 변경 및 원인행위금액 확정 요청(특수페인트)

1. 도로보수과-1272호(2018.2.9.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행하고 있는 『2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』에 소요되는 관급자재(특수페인트)의 납품기한 변경 및 원인행위액 확정을 아래와 같이 요청 하오니 조치하여 주시기 바라며,

3. 관급자재 납품기한 변경후, 조달청 분할납품 요구 및 통지서를 송부하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 관급자재 구매(특수페인트-노면표시용)

※ 납품요구번호 : 12-18-1-20533-00

나. 납품기한

1) 당   초 : 2018. 05. 18

2) 변   경 : 2018. 12. 31

다. 원인행위 확정금액 : 붙임참조

라. 변경사유 : 관급자재(특수페인트) 구매 의뢰시 납품기한을 2018년 12월 31일까지로 의뢰하였으나, 분할납품요구 및 통지서에는 특수페인트 황색은 2018년 12월 31일, 백색은 2018년 5월 18일로 되어 있어 특수페인트(백색)을 2018년 12월 31일로 납품기한을 변경하고자 함.

마. 예산과목

1) 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 노면표시 도색 및 제거, 시설비【198,757,330원】

2) 도로시설물 관리, 도로 및 도로시설물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비【29,810,610원】

3) 도로시설물 관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비【19,863,780원】

붙임  1. 특수페인트 구매내역 및 원인행위 확정금액 1부.

2. 조달청 분할납품요구 및 통지서 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	박성근		도로보수과장	04/11 김권일
협조자	관리단속과장	이희천
시행	도로보수과-3369	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동67-1) 강서도로사업소	/
전화	02-2657-7942	/전송	02-2657-7960	/		/	대시민공개