문서번호	품질지도과-706
결재일자	2018.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
김보석		이창훈	04/12 代김석태
협 조
	주무관			장국현
	주무관			이준석

2018년도 1/4분기 건설공사 품질관리 점검실적 보고

2018. 4.

품질시험소

(품질지도과)

2018년도 1/4분기

건설공사 품질관리 점검실적 보고

건설공사장의 품질지도 및 품질향상을 위하여 운영 중인 3개반  (품질관리 적절성 확인, 품질시험계획 이행확인, 현장확인 기동반)의 2018년도 1/4분기 점검실적 보고임

Ⅰ		품질관리 점검 개요

○ 점검기간 : 2018.3.1.~ 3.31.

○ 점 검 자 : 품질지도과 직원(8명), 품질점검위원(59명)

○ 분야별 점검현황

구 분	분 야 별					비고
	계	도로	도시철도	치수∙하수	건축
계	53	8	5	4	36
품질관리 적절성확인	23	2	-	-	21
품질시험계획 이행확인	21	5	2	2	12
품질관리 현장기동반	9	1	3	2	3

Ⅱ		분야별 품질점검 내용

품질관리 적절성 확인

○ 점검대상

- 전면책임감리 대상인 건설공사로서 총공사비가 500억이상인 건설공사

- 다중이용건축물의 건설공사로서 연면적 3만㎡이상인 건축물의 건설공사

○ 주요점검내용

- 외부전문가와 합동으로 KS Q ISO 9001에서 요구하는 품질관리계획서 적정수립과 품질관리 적정이행여부 ⇨ 고품질 유지와 안전에 중요한 영향을 미치는 26개 항목

○ 점검실적(1/4분기)

구 분	점검계획 (연간)	점검실적 (1분기)	누 계	지적건수 (1분기)	비고
품 질 관 리 적절성 확인	143	23	23	467

○ 주요지적 사항

- 품질방침 및 목표는 주기적 교육을 통해 현장 내 모든 근로자들이 품질활동에 참여할 수 있도록  유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람.

- 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성

- “품질관리계획서” 있는 품질목표를 실천하기 위한 세부실천계획에 계획의 목표치를 구체적으로 수치화하여 설정하기 바람

- 2018년도 수방계획을 조기 수립하여 봄철 기습 폭우 등 에 대비

- 보관자재는 자재점검표에 의거 주기적(월 2회)으로 점검하고, 시공 협력업체 보관자재에 대해서도 월 1회 이상 점검을 실시

- 옥내변전실 : 출입구 상부에 캐노피를 설치하여 강우시 우수가 내부로 침투하지 않도록 하기 바람

- 조적 코너부가 맞물려있지 않고 통줄눈이 발생되어 있으니 정비하기 바람

- 단열재 조인하부에 노출된 몰탈잔재를 전부 제거하여 열교현상이 발생하지 않도록 하기 바람

-  철근 이음길이가 미 확보된 부분에 대하여 대책을 강구하시기 바람.

- 지하 1층 기둥 철근 피복두께 부족부분은 철근 쏠림이 일어나지 않도록 재시공 바람.

- 창틀과 벽체 사이 틈새를 충분히 깊게 충진하기 바람(AL창)

- 옥상 파라펫 부위를 도막 방수로 실시하였음. 도막 방수 부위에 부분적으로 핀홀 현상이 발생하여 방수하자가 우려됨으로 보완조치 바람.

품질시험계획 이행확인

○ 점검대상

- 총공사비 30억원 이상인 서울시 발주공사

- 시험계획 수립대상공사로써 발주자가 의뢰한 공사

※ 시험계획 수립대상 ⇨ ①토목공사(총공사비 5억원 이상), ②건축공사(연면적이 660㎡ 이상), ③전문공사(총공사비 2억원 이상)

○ 주요점검내용

- 품질시험계획서의 적정수립 및 이행여부

- 각종 품질관리대장 작성실태, 시험실 설치 및 운영상태

- 품질 관리원 선임 적정여부, 품질시험검사 적정이행 여부 등

○ 점검실적(1/4분기)

구 분	점검계획 (연간)	점검실적 (1분기)	누 계	지적건수 (1분기)	비고
품질시험계획 이행확인	92	21	21	93

○ 주요지적 사항

- 품질시험계획서 작성 시

• 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험계획 물량을 산정

• 시험계획 횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하여 작성하고 누락된 자재를 포함 작성

- 시험·검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 종목 및 규격별 모두 포함하여 작성하고 실적은 누계관리

- 품질시험검사대장은 자재별로 시험기준, 시험결과 등을 명확히 구분 작성

- 지하2층 바닥 작업구 철근 심하게 구부러진 부분 보강근으로 보완 시공 바람

- 지상부 펌프장과 방류맨홀사이의 구조물 방수보호막 설치를 재정비하여 부착시킨 후 되메움을 실시바라며 되메움은 상부 1m정도에 대하여 장비사용 층다짐 실시 바람

- 본관동 내부 화장실은 조적벽체로 시공되어 액체 방수로만으로는 모체의 균열로 인해 방수기능이 저하되어 하자가 우려됨으로 도막방수 등으로 보완하시기 바람.

- 계단실 경사부위 이어치기 재료분리 부분 V cutting 한 후 청소를 깨끗이 한 다음 같은 강도 모르타르에 Band액을 섞어서 보수 요망

- 옥상층 태양광구조물 설치시 독립기초의 앙카볼트는 선매립 긴결시공이 중요한 바, 후 매립형 앙카볼트 설치로써 독립기초의 구조체에 앙카볼트가 긴결시공 되도록 하기 바람

- 옥상 캐노피 물끊기 시공부분 벽체로 물이 흘러내리지 않도록 보완하기 바람(벽체와 5cm 정도이격)

- 아파트 외벽 Asphalt 방수시트 보호재는 벽체 상단까지 올리고 우수가 유입되지 않도록 밀착시공 바람

현장확인 기동반

○ 점검대상

- 서울시 및 투자기관에서 발주한 공사

- 자치구청장이 기동반 점검을 의뢰한 건설공사

○ 주요점검내용

- 공기량, 슬럼프, 염화물 함량 등 굳지않은 레미콘에 관한 시험

- 철근, 벽돌, 방수재, 도로포장 재료 등 사용자재의 적정여부

- 품질검사 이행여부 등

○ 점검실적(1/4분기)

구 분	점검계획 (연간)	점검실적 (1분기)	누 계	지적건수 (1분기)	비고
현 장 확 인 기 동 반	135	9	9	-

○ 현장 시료채취 시험결과

- 현    장 : 9개 현장

- 시료종류 : 콘크리트벽돌, 시멘트, 속빈콘크리트 등

- 결    과 : 시료채취 10개(적합 8, 부적합 1, 진행중 1)

※ 부적합 사유 ⇨ 콘크리트벽돌 흡수율 미달

Ⅲ		1/4분기 품질관리 점검실적

구 분	점검계획 (연간)	점검실적(현장)		지적건수			비고
		1분기	누계	계	처리완료	조치중
계	370	53	53	560	22	538
품질관리계획 적절성확인	143	23	23	467	-	467
품질시험계획 이행확인	92	21	21	93	22	71
품질관리 현장확인 기동반	135	9	9	-	-	-	시료 채취

Ⅳ		점검결과 조치

○ 점검결과 지적사항을 발주청(인․허가청) 및 시공사, 감리단에 통보하여 시정 조치토록 하고 조치결과를 문서로 제출토록 함

○ 공사 시행청(인․허가청)에서 제출된 시정조치 내용을 검토하여 담당자가 종경처리

○ 시료채취 시험결과 부적합 자재는 현장외 반출조치하고 신규로 다시 반입되는 자재는 공인시험기관의 성적서 제출

붙임 1. 품질관리계획 적절성확인 점검현황(1분기) 1부.

2. 품질시험계획 이행확인 점검현황(1분기) 1부.

3. 품질관리 현장확인 기동반 점검현황(1분기) 1부. 끝.