투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	(주)솔로스건설 대표 신현숙
(경유)
제목	제1차 작업기간 변경[2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)]

1. 귀 사의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. 기전과-1453(2018.4.4.)호와 관련입니다.

3. 우리사업소에서 1차 작업지시하여 시행중인 터널, 지하차도 세척 작업에 대하여 아래와 같이 작업기간 변경 지시하니 기한내에 작업 완료하고 증빙서류를 첨부하여 완료 보고 하시기 바랍니다.

가. 변경 내용

구 분	당초	변경
작업기간	4.6 ~ 4.25	4.6 ~ 4.30
작업내용	변경없음

끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김해중		기전과장	04/12 임태수
협조자
시행	기전과-1624	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	3284-5456	/전송	832-5470	/	win686@seoul.go.kr	/	대시민공개