＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	요금과장
(경유)
제 목	지연배상금 고지서 발급의뢰 *******************************

1. 시설관리과-6534(2018. 4. 11.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소가 발주한 「*****************************」의 계약 상대자가 준공 지연하였기에 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조 및 동법 시행규칙 제75조의 규정에 따라 아래와 같이 지연배상금을 부과 결정하고 고지서 발급을 의뢰합니다.

가. 계약내역

계약업체		계약금액	계약일자	준공기한	준공일자	준공검사일
상호	대표자
***********	***	9,931,160원	2017. 3. 31.	2018. 3. 31.	2018. 4. 4.	2018. 4. 11.

나. 지연배상금 내역

1)지연일수: 9일 (2018. 4. 3.~ 4. 11.)

2)지연상금율: 1.3/1000

3)지연배상금:  2,482,790원 x 0.0013 x 9일 = 29,040원

(기성금액 x 지체상금율 x 지체일수)

붙임  준공검사조서 1부.  끝.

	행정지원과장
주무관	서은영		행정관리팀장	김종진		행정지원과장	04/12 김인웅
협조자
시행	행정지원과-7852	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-4720	/전송	02-3146-4953	/		/	부분공개(5)