문서번호	설비부-4937
결재일자	2018.4.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관		녹색성장과장
진종구		04/13 오삼록
협 조
	주무관		백남진

『종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사』

설계변경 소위원회 심의 요청

2018. 04.

설  비  부

설계변경 소위원회 심의요청서

문서번호		요청부서		설비부		요청일		2018년 04월 일
공 사 명	종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사
공사개요	공사규모		총연장 3.8㎞(세종대로 사거리 ~ 동묘앞역)
	공사기간		2017. 9.15.~2018. 4.30.
	감 리 사		㈜제일엔지니어링종합건축사사무소, ㈜삼안
	설 계 사		㈜진화기술공사
	시 공 사		대현산업기술(주)
자문 안건명			전기공사 설계변경 실정보고				요청금액 (감액)		-238,014천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 변동(토목공사 수정, 취소 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 보도 확장공사 취소와 설계 누락에 의한 물량변경과 케이블 포설방법(지중→가공) 변경에 따른 설계 변경
원설계자 의견(요약) ○ 현장여건 변경에 따른 내용과 설계 누락사항 반영 필요
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 가로등 설치공사 - 이설공사 : 0본 → 8본 ▪ 중앙버스정류장 전력 공급공사 - 굴착복구 : 0m → 427m ▪ 신호등 설치공사 - 신호등주 : 59본 → 40본 - 굴착복구 : 2,419m → 230m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 823,416천원 - 변 경 : 585,402천원 - 증·감 : -238,014천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 가로등 및 신호등 설치공사
별첨서류	1. 내역서 1부 2. 도면 1부

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사
계약금액	823,416,000원	계약일	2017. 9.13.	시공사	대현산업기술(주)
공사기간	2017. 9.15 ~ 2018. 4.30	낙찰율	86,745%	설계자	㈜진화기술공사
계약형태	일반경쟁입찰			감리자	㈜제일엔니어링종합건축사사무소외 1개사
공사규모	총연장 3.8㎞(버스정류장 15개소)			※ 작성자 : 진종구 ☎ 3708-8636

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분		변경전	변경후	증/감
변 경 개 요	가로등 설치	이설 0본	이설 8본	이설 8본
	신호등 설치	신호등주 철거 47본 신호등주 신설 59본 신호등 231개 관로터파기 1,315m	신호등주 철거 16본 신호등주 신설 40본 신호등 116개 관로터퍼기 230m	신호등주 철거 –31본 신호등주 신설 –19본 신호등 –115개 관로터파기 –1,085m
	버스정류장 전력간선	강제전선관(104㎜) 0m 케이블(FCV 2C×4㎟) 0m	강제전선관(104㎜) 184m 케이블(FCV 2C×4㎟) 1,915m	강제전선관(104㎜) 184m 케이블(FCV 2C×4㎟) 1,915m
공사비(천원)		823,416	585,402	-238,014
적 용 요 율		87.745	87.745	-
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	계약단가에 물량가감 산정
설계변경 근거	방 침	설계변경 검토보고(`18. 4.13)
	관련규정	공사계약일반조건 제21조 제2,3,4항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 변동(토목공사수정,취소 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	• 보도확장공사 취소와 시공 현장여건 변경 등에 의한 설계변경
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	▢ 이행 ☑ 미이행