투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	정림건축컨소시엄 대표 임진우 귀하
(경유)
제목	『영동대로 지하공간 복합개발』관련 기본설계용역 설계변경 검토요청

1. 도시철도계획부-3123호(2018.4.12.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 당초 기본설계 예산책정 시 지하안전영향평가 관련 시행규정과 평가항목이 명확하지 않아 기본설계에 포함하여 일괄계약하였으나, 지하안전법 제24조에 따라 사업의 수립·시행과 관련되는 계약은 분리 계약토록 규정하고 있어 별도로 용역을 시행하고자 하오니 아래와 같이 조치하여 주시기 바랍니다.

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감
공급가액	15,983,699,200	15,882,899,200	감100,800,000
부가가치세	1,598,369,920	1,588,289,920	감10,080,000
계	17,582,069,120	17,471,189,120	감110,880,000

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이상원		영동대로복합개발과장	김동철		도시철도계획부장	04/13 김진팔
협조자	주무관	이상훈		주무관	윤득근
시행	도시철도계획부-3150	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 10층	/
전화	02-772-7194	/전송	02-772-7304	/	wonlee2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)