문서번호	도로보수과-3205
결재일자	2018.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
조지웅		김학동	04/16 신응수
협 조

『2018년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부』

설계변경(제1차) 검토 보고

2018 . 4.

북부도로사업소

(도로보수과)

『 2018년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부 』

설계변경(제1차) 검토 보고

우리 사업소에서 시행중에 있는『2018년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부』와 관련하여 시공물량 증·감 등에 따른 설계변경(제1차)을 시행하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2018년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부

○ 공사개요 : 도로표지병 설치 4,000개, 과속방지턱 도색 1,500㎡,부속물 세척 10,000㎡, 시선유도봉 설치 100개

○ 공사기간 : 2018. 02. 28. ~ 2018. 12. 31.

○ 도 급 액 : 248,024,290원

○ 도 급 자 : *****************

Ⅱ		설계 변경 사유

○ 도로관리과-3038(2018.02.22.)호 2018년 도로사면 보수보강사업 예산 재배정 알림

○ 도로보수과-2183(2018.03.15.)호 『작업지시(1차)』에 따른 도로부속물 세척 및 과속방지턱 도색

○ 도로보수과-2244(2018.03.19.)호 해빙기 대비 도로사면 점검결과 정비계획 보고

○ 도로 및 교통 부속물 순찰 지적사항, 120 민원사항, 관할 경찰서의 요청 사항에 따른 시공물량 변경.

Ⅲ		주요 변경 내역

○ 주요 공정 물량 변경 내역

연번	공종	규 격	단위	수 량		증·감
				당 초	변 경
1	과속방지턱 도색		㎡	1,500	1,950	증)	450
2	구조물 세척		㎡	10,000	9,905	감)	95

○ 추가 신규 공정 내역

- 도로사면 보수 (방학동 옹벽 외 2개소)

연번	공종	규 격	단위	수 량		증·감
				당 초	변 경
1	콘크리트 표면 처리	그라인딩	㎡		242	증)	242
2	콘크리트 표면 보수	벽체,침투식	㎡		242	증)	242
3	콘크리트 단면 복구	벽체 T=20mm	㎡		4.2	증)	4.2
4	옹벽상단 도색	흑색, 적색	㎡		75.7	증)	75.7
5	균열보수	홈따기 후 씰링	m		5.4	증)	5.4
6	강관틀비계		㎡		141	증)	141

※ 도로사면 보수보강 사업 예산 재배정 : 30백만원

○ 변경금액

(단위 : 원)

구분		수 량		증·감
		당 초	변 경
총공사비		443,987,290	473,987,290	증) 30,000,000
도급비	공급가액	225,476,628	252,749,355	증) 27,272,727
	부가가치세	22,547,662	25,274,935	증) 2,727,273
	계	248,024,290	278,024,290	증) 30,000,000
이 전 비		13,000,000	13,000,000	-
관급자재비		182,963,000	182,963,000	-

- 예산과목

·(일반회계)안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로부속시설물 일상 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(370,000,000)

·(특별교통회계) 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전 관련 도로부속물 유지관리,시설비 및 부대비, 시설비(106,000,000)

·(일반회계)안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로사면붕괴예방을 위한 보수보강, 시설비 및 부대비, 시설비(30,000,000)

Ⅳ		조치계획

○ 상기 보고와 같이 재배정 된 도로사면 보수 보강사업 예산 추가 반영하고 작업지시 1,2차 작업지시 관련 물량 증·감에 대하여 설계변경 시행하고자 함.

붙 임 : 설계변경(제1차) 내역서 1부.  끝.