문서번호	건축부-5264
결재일자	2018.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
서경식		차무흥	04/16 임인구
협조

『시민생활사박물관 리모델링 공사』

폐기물 처리 실정보고 검토

2018. 4.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시민생활사박물관 리모델링 공사』

폐기물 처리 실정보고 검토

「시민생활사박물관 리모델링 공사」공사 중 추가로 발생한 사업장 일반폐기물(소각 및 매립) 처리를 위한 실정보고가 제출되어 검토보고 함

공사개요

○ 용 역 명 : 시민생활사박물관 리모델링 공사

○ 위    치 : 노원구 공릉동 622(구 북부법조단지)

○ 규    모 : 지하1층/지상5층, 연면적 6,919㎡

○ 공사기간 : `17.10.20. ~ `19. 2.19.

○ 계약금액 : ***************

○ 시공자/감리사 : ㈜제이앤이건설 외 3개사/(주)경호엔지니어링 외 1개사

○ 현 공 정 : 기초보강 및 토목공사(공정률 : 17%)

추진경위

○ `15. 8. 31. : 가칭 시민생활사박물관(박물관MALL) 조성 건립계획

○ `15. 8. 31. : 설계 및 공사의뢰(박물관과 → 건축부)

○ `16. 4. 21.~ 11.31. : 설계용역

○ `17. 1. 25.~ 5. 24. : 기초 구조자문(1~3차)

○ `17. 8. 25. : 공용건축물 협의 완료

○ `17. 10. 20. : 공사 및 건설사업관리용역 착수

태릉입구역 화랑대역
위 치 도	조 감 도

실정보고 내용

○ 보고 현황

-「방치폐기물 추가 현황보고」시생박(건설관리) 제24호 (2017. 12. 22.)

-「철거 중 발생된 매립 및 소각대상 폐기물 현황보고」시생박(건설관리) 제37호 (2018. 1. 11.)

-「가연성 폐기물 추가발주 요청」시생박(건설관리) 제69호 (2018. 2. 8.)

-「실정보고 검토의견서 제출(폐자재 처리)」시생박(건설관리) 제106호 (2018. 3. 20.)

-「실정보고(폐기물 추가)」시생박(건설관리) 제138호 (2018. 4. 13.)

○ 추가 발생 폐기물 (철거 폐기물 및 현장 방치 폐기물)

- 소각 대상 폐기물: ********************************

*****************************

**************************

- 매립 대상 페기물: ***************

○ 감리자 검토 의견

- 「구 북부법조단지 환경개선공사」 및 「시민생활사박물관 리모델링 공사」의 원활한 공사 진행과, 가연성폐기물의 화재 위험 예방을 위하여 조속한 반출이 필요함

설계변경 내용

○ 관련 근거

- 건설사업관리업무지침서 제63조(설계변경관리)제1항

- 지방자치단체 입찰 계약집행기준(제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사설계의 변경)

- 폐기물관리법 제13조(폐기물 처리 기준 등)

○ 변경 내용(폐기물 처리비용) (*************, 부가세 포함)

(단위: 원)

변경전	변경후	구분	증감	비고
***********	***********	소각 및 매립 대상 폐기물	************
		소각대상 폐기물(폐목재)	***********

○ 변경 세부내역

- 소각대상 폐기물(폐목재 제외) 및 매립대상 폐기물 (*************, 부가세 포함)

(단위: 만원)

구분	폐기물	물 량		견적 금액(원/㎥)				적용 단가	비고
		㎥	톤 (환산)	구분	성한 개발	다흥 산업	청송 산업
소각	폐판넬	****	****	단가	***	****	****	***
	폐합성수지	****	****
	혼합폐기물	*****	****
	폐보드	***	***
매립	폐섬유	****	****		****	****	****	****
합 계		*****	*****	공급가액	*****	*****	*****	*****

- 소각대상 폐기물(폐목재) (증 3,300,000원, 부가세 포함)

(단위: 만원)

구분	폐기물	물 량		견적 금액				적용 단가	비고
		㎥	톤 (환산)	구분	천일 에너지	우성 그린산업	한국목재재생산업
소각	폐목재	*****	****	단가	**	**	**	**	*************** ***************
				공급가액	***	***	***	***

처리의견

○ 추가 발생된 사업장폐기물(지정폐기물외 폐기물)에 대하여는 시공자가 전문면허를 소지한 폐기물업체【중간처분업체(소각폐기물), 폐기물최종처분업체(매립폐기물), 재활용처리업체(폐목재)】와 직접 계약․처리하고, 설계변경에 반영토록 승인(도급공사에 반영, 간접비 제외)하여 공사시행에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1) 실정보고(소각 및 매립 대상 폐기물 - 폐목재 제외) 1부.

2) 실정보고(소각 대상 폐기물 - 폐목재) 1부.  끝.