문서번호	기전과-3249
결재일자	2018.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		04/16 송장현
협조
	주무관		정경성

『마곡지구 도시개발사업 교통신호기공사(마곡유치원, D2교차로)』

교통안전시설물 원인자 부담공사 승인 변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4.

강서도로사업소

(기전과)

『마곡지구 도시개발사업 교통신호기공사(마곡유치원, D2교차로)』

교통안전시설물 원인자 부담공사 승인 변경 검토보고

교통신호기 원인자부담공사 승인변경요청 건에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

서울경찰청 교통관리과-32311(2017.11.13.) 교통안전시설 개선설치 통보(하달)

서울주택도시공사 기전사업부-789(2018.03.22.) 마곡지구 도시개발사업 교통       신호등공사 원인자부담공사 승인 변경요청

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 마곡지구 도시개발사업 교통신호등공사

원 인 자 : 서울주택도시공사

공사기간 : 승인일로부터 ~ 2018.5.31.(계약서상)

공사장소

가. 마곡유치원 : 강서구 마곡서로 139-13 인근

나. D2교차로 : 강서구 마곡동 마곡지구 D2 교차로

공사개요

가. 마곡유치원

- 대각선 횡단보도 신설

- 보행신호기 신설 및 신호등 교체(3색등→4색등)

※ 잔여표시기 병행 설치

나. D2교차로

- 신호기(차량등, 보행등) 이설

※ 이설사유 : 신축부지 보도 셋백으로 인한 교통안전시설물 이설

관련업체 및 주요설치 내용

원인자	설 계	감 리	시공업체	비 고
서울주택도시공사	도로교통공사	㈜건영이앤씨	㈜영진종합건설

Ⅲ		검 토 내 용

구 분	검 토 사 항	검 토 결 과
일 반	규제심의내용과 설계도서 내용 대조	적 정
기 타	변경 승인 등에 따른 문제점 등의 현장조사	토목분야 병행 개선필요

Ⅲ		검 토 결 과

마곡유치원 : 조건부 승인

가. 승인조건

1. 시각장애인 보행안전 확보

- 음향신호기 주변 휀스 및 보도경계석 병행 개선

2. 보행자 보행안전 확보

- 대각선횡단보도 주변 보도경계석 병행 개선

- 교통안전시설(제어기 등)이 보행에 지장을 주지 않도록 조치

3. 조건부 승인 사항

마곡유치원 : 승인

Ⅳ		행 정 사 항

교통신호기 원인자 부담공사 승인 공문 발송

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인요청 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면(마곡유치원) 1부.

4. 설계도면(D2교차로) 1부.

5. 현장조사 사진대지 1부.  끝.