문서번호	도로시설과-4348
결재일자	2018.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	전용도로팀장	도로시설과장
박용화	윤병헌	04/16 이철

자동차전용도로 방음시설 보수보강 추진계획

2018.04.

안전총괄본부

(도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	서울시설공단
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

자동차전용도로 방음시설 보수보강 추진계획

설치기준에 부적합 및 노후(황변)된 방음시설을 교체 정비하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

□ 관련근거

○ 방음시설의 성능 및 설치기준(환경부고시 제2017-159호, '17.8.29.)

○ 자동차전용도로 방음시설 점검·조사분석 용역(서울시설공단, '16.12.11.)

□ 시설물 상태

○ 1구간 : 강변북로

- 대 상 지 : 강변북로 청담대교~잠실대교 구간

- 노후상태 : PC방음판(투명) 황변발생 ⇒ 시인성 불량

- 설치현황 : 총 2,308m, H=3.0~6.0m

※ 총 L=2,308m 중 1,232m 기 정비완료(잔여구간 1,076m 중 296m 정비예정)

설치 기준 (B×H)	설치 현황 (B×H)
125×125	100×100

○ 2구간 : 올림픽대로

- 대 상 지 : 올림픽대로 노량교 구간

- 노후상태 : 방음벽 지주 규격 미달

- 설치현황 : 총 L=922m, H=3.0m

※ 총 L=922m 중 '18년도 500m 정비 후 '19년도 잔여구간 정비 예정

청담대교 잠실대교 신자초교 자양유수지 사업대상지 L=296m 기 정비완료 잔여구간	한강대교 동작대교 명수대현대@ㅁ 흑석역 사업대상지 L=500m 잔여구간
강변북로 청담대교~잠실대교 구간	올림픽대로 노량교 구간

□ 세부 추진계획

○ 1구간 : 강변북로 청담대교~잠실대교 구간(박래학 前)시의원 요구사업)

- 사업구간 : 강변북로 신자초교~자양유수지

- 사업내용 : 혼합형 방음판(하단 흡음판, 상단 투명판) 교체

- 사업규모 : L=296m, H=3.0~4.5m, A=1,122㎡

※ H=3.0m 구간(L=140m), H=4.5m 구간(L=156m)

- 총사업비 : 350백만원

○ 2구간 : 올림픽대로 노량교 구간(최초 방음벽 설치 : 1993년도)

- 사업구간 : 올림픽대로 흑석역~명수대현대아파트

- 사업내용 : 규격 미달 방음벽 교체 정비(노후 소음감쇠기 교체 미포함)

- 사업규모 : L=500m, H=3.0m, A=1,500㎡

- 총사업비 : 700백만원

- 특이사항 : 소음저감 민원에 따른 소음분석용역(10백만원) 실시 후 공사 시행

⇒ 소음분석 및 노량교 구조해석을 통한 방음시설 규모(소음감쇠기 포함 등) 및 노량교 안전성 검토 후 사업 시행 ⇨ 준공 후 민원 발생 방지

⇒ 용역 결과에 따른 방음시설 규모 변경으로 물량 조정(감소) 예상

○ 민원내용

- 민원일시 : 2018.02.26.(월)

- 민 원 인 : 명수대현대아파트 입주자대표회의(동작구 현충로 119)

- 민원내용 : 소음저감대책 요청

‣ 방음벽 증설(현재 2.5m ⇒ 3배 이상), 노후 소음감쇠기 교체

‣ 저소음포장(복층 아스콘포장), 속도제한(당초 80㎞/h ⇒ 50㎞/h)

- 회신내용 : 야간소음이 기준을 초과하고 있으나 도로개설 후 건설된 공동주택으로 주택사업자가 소음대책을 이행하여야 사항으로 예산, 구조적 적정성 등 검토를 통하여 정비 시행 추진

○ 소음측정 결과

- 측정일시 : 2018.03.15.(목)~03.16.(금)

- 측정기관 : 서울시설공단 도로관리처

- 측정결과(측정위치 : 명수대현대아파트 108동)

구분	측정일시	측정결과(㏈)		소음기준(㏈)	비고
		1층	15층(옥상)
주간	'18.03.16. 13~14시	62.9	67.7	68	기준 만족
야간	'18.03.15. 23~24시	60.1	75.5	58	기준 초과

□ 향후 추진계획

○ 1구간 : 강변북로 청담대교~잠실대교 구간

- '18.04. : 자체설계 및 서울시 디자인 심의

- '18.05. : 공사 발주

- '18.06.~10. : 공사 시행 및 준공

○ 2구간 : 올림픽대로 노량교 구간

- '18.04. : 사업 추진계획 수립 및 소음분석 용역 발주

- '18.05. : 소음분석 용역 시행 및 서울시 디자인 심의

- '18.06. : 용역 준공 및 자체 설계

- '18.07. : 공사 발주

- '18.08.~12 : 방음벽 교체사업 시행 및 준공.

붙임 : 소음민원 검토보고서 1부.  끝.