문서번호	조경과-2165
결재일자	2018.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	주무관		조경과장		관리부장
김유미	강금완		강인호		04/17 代이행용
협 조
	전략기획실장					유연호
	주무관					이옥하

호랑이 조형물 정비계획 변경보고

2018. 4

조  경  과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

호랑이 조형물 정비계획 변경보고

호랑이 조형물을 당초 앞부분만 도색할 계획이었으나 페인트가 탈색되고 뒷부분과의 이질감 등으로 공원미관을 저해하므로, 대공원의 랜드마크인 호랑이 조형물 전체를 도색하여 공원수준을 향상코자 함.

Ⅰ		추 진 방 향

○ 현재 호랑이 조형물 전체가 노출되어 있는 상태로, 당초 계획대로 호랑이 앞부분만 도색할 시 뒷부분과 이질감이 생겨, 오히려 공원미관이 저해될 수 있으므로,

○ 수준높은 공원 시설물 관리를 위해 당초계획을 변경하여, 전체 도색을 실시하는 것으로 추진

< 호랑이 조형물 >

Ⅱ		변 경 계 획

○ 위    치 : 동물원 정문광장 호랑이 조형물

○ 규모 및 재질 : 폭 4.2m × 높이 5m × 길이 13.5m, FRP

○ 기    간 : 2018. 4. 16 ~ 4. 30

○ 변경내용 : 호랑이 앞부분 도색 → 전체 도색으로 변경

○ 소요예산 : 당초 10,000천원 → 변경 20,000천원

※ 부족 예산(10,000천원)에 대하여는 『보행환경 개선을 위한 가로숲길 조성(유스트림 )사업』에서 확보 추진

○ 예산과목

- 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 조경시설물 설치 및 정비, 시설비 : 10,000천원

- 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리, 시설비 : 10,000천원 (추가 확보)

Ⅲ		추 진 방 법

○ 계약방법 : 수의계약

○ 근거법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

○ 수의계약 사유 : 금액이 2천만원이하 소액이고, 도색 경험이 많은 전문업체 선정

Ⅳ		추 진 일 정

○ 2018. 4. 18. : 공사계약 시행

○ 2018. 4. 19. ~ 30. : 도색작업 시행 및 완료

Ⅴ		기 대 효 과

○ 수준높은 공원시설 관리로 공원미관 향상 및 이용자 정서함양 기여

○ 동물원 대표 조형물 정비로 공원이미지 제고 및 아름다운 공원환경 조성에 기여.  끝.