문서번호	시설보수과-3051
결재일자	2018.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이동섭		권순회	04/17 신동헌
협조

도로시설물 세척용역 실정보고

(일반교량 추가 세척)

2018. 4

서부도로사업소

(시설보수과)

도로시설물 세척용역 실정보고

(일반교량 추가 세척)

봄맞이 도로시설물 세척 관련, 우리 사업소 장비(물차) 고장 및 수리 장기화로 직영반에서 일반 소교량 등의 물청소가 불가함에 따라 4월중 외주 용역을 활용하여 해당 시설물 세척을 완료코자 함.

□ 추진배경 및 문제점

○ 당초 3월 중순부터 4월 중순까지 관내 소규모 일반교량을 대상으로 직영반 물청소 작업을 계획하였으나,

○ 겨울철 미운용 장비였던 고압살수 전용 물차의 기어펌프 작동 불량으로 장비 수리에 장기간이 소요되고 있어 봄맞이 교량 난간 물청소 지연

□ 조치방안

○ 봄맞이 도로시설물 청결대책 추진을 4월중 완료하기 위하여 ‘2018년 도로시설물 세척용역 업체에 추가 작업지시 하여 시행코자 함.

○ 추가 세척대상 시설 : 성산2교외 30개소

- 성산2교, 성산2교, 염천교, 성산고가, 홍연2교, 중동교, 은평지문, 신응교, 홍제교, 홍연교, 반딧불이다리, 봉원고가, 현저고가, 남산육교, 삼천골다리, 북한천다리, 중암교, 증산2교, 백련교, 성산3교, 욱천고가, 잠두봉고가, 상암교, 증산교, 진관천교, 성산교, 성산1교, 홍남교, 연남교, 삼각지고가, 소월고가, 한강로다리

○ 용역비 추가 소요금액 : 약30백만원

- 선 작업지시 하여 세척 완료하고 추후 설계변경 반영코자 함

○ 작업기간 : 약 3일 소요 (2개팀 동시 운영)

□ 향후계획

○ 2018.4.18. ~ 4.26. : 도로시설물 세척 2차작업 시행.  끝.