문서번호	도시철도설비부-3701
결재일자	2018.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
이재돈	강치석	04/18 구자훈

9호선 3단계 시운전 결과 보고

2018.04.16

서울시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 3단계 일일 시운전 보고

2018.04.16.(월)

□ 금일 실적

급 전	단 전	시운전 시험시간
10 : 05	17 : 07	10:40 ∼ 16:54

○ 시험내용

- 931역 제어권 열차 고속주행(80km) 신호시험

○ 차량탑승인원 : 7명 (본부 : 1명, 감리·공사관계자 : 4명, 기관사 : 2명)

※ 3단계 구간 주박시 급전후 차량 점검(예열 및 점검 등) 시간 : 약 20분 소요

□ 본선 출입승인

구분	분 야 (공구)	회사명	작업구간	작업명	작업인원	비 고
1	토목	삼성물산	931~932 931~933	누수보수 합동점검	4명 14명	4.16~4.17 18:00~05:00
2	토목	서울메트로9호선운영	934~935	터널내 점검	4명	4.16~4.17 21:00~04:00
3	토목	포스코건설	921공구	누수보수	4명	4.16~4.17 22:00~06:00
4	토목	롯데건설	934정거장	물청소, 구조물보수	10명	4.16~4.17 18:00~06:00
5	통신	일광기업	931~938	통신케이블 포설	16명	4.16~4.17 단전후~04:00
6	기계	삼성물산	932,933	PSD 고무발판용(스티로폼) 설치	2명	4.16~4.17 단전후~20:00
7	전차선	동양통신	930~935	전차선높이 및 편위측정	3명	4.16~4.17 180~0200
8	송병전	서울메트로9호선운영	931변전소~관센센터	SCADA 연동시험	4명	4.16~4.17 20:00~0400
9	이동통신	LG플러스	933정거장	대합실,승강장,터널 안네나, 급전선 설치	13명	4.16~4.17 22:00~06:00
10	이동통신	SKT	932~937	통신공사, 실사	36명	4.16~4.17 18:00~04:00
11	이동통신	KT	933~937	급전선포설, OPC 전원작업	11명	4.16~4.17 22:30~05:00

□ 시운전 전동차

○ 편성번호 : 941편성(4량) 1대

○ 주    박 : 하선 32k8

□ 명일(4/16) 시운전 계획

○ 시운전 차량 : 4량 전동차(941편성) 1대

○ 급       전 : 08:10

○ 시운전 시간 : 08:30 ~ 17:00

○ 단       전 : 17:05

○ 참  여  자 : 시운전 상황실(3명), 본부( 1명), 공사관계자(감리 등) 4명,

기관사(박보람, 신동주) 2명

○ 시험내용(신호시험) : 931역~938역 제어권 고속주행 시험