투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	「마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사 설계용역」 계약변경 의뢰

1. 우리본부에서 시행중인 「마곡산업단지 공공산업지원시설건립공사 설계용역」에 대한 총차 및 2차계약을 아래와 같이 변경요청하오니 처리하여 주시기바랍니다.

가. 용 역 명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사 설계용역」

나. 용역기간 : 2016.11.28 ~ 2018.04.22(2차 : 2018.03.12 ~ 2018.04.22)

다. 계약금액 : 2,200,000,000원 (2차 :235,,000,000원)

라. 계 약 자 : ㈜스페이스연 건축사사무소 대표 이상대

마. 계약내용

구 분	계약금액		용역기간		비 고
	변경전	변경후	변경전	변경후
총차	2,200,000,000원	변경없음	2016.11.28 ~ 2018.04.22	2016.11.28 ~ 2018.05.23	31일 연장
2차	235,000,000원	변경없음	2018.03.13 ~ 2018.04.22	2018.03.13 ~ 2018.05.23	31일 연장

바. 예산과목 : 서남권사업과, 첨단 R&D 단지조성 및 도시재생 신성장 경제

거점 마곡  R&D 클러스터조성,마곡산업단지 공공산업지원시설 건립, 시설비

붙임 : 1. 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사 설계용역 기간연장 검토보고 1부.

2. 마곡산업지원시설건립 설계용역 기간연장요청 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	정호기		복지시설과장	조영수		건축부장	04/18 임인구
협조자	경리과장	최정수
시행	건축부-5375	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2652	/전송	02-3708-2659	/	bluenight@seoul.go.kr	/	부분공개(7)