위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	(주)한국시설안전연구원 대표이사 귀하
(경유)
제 목	과업수행계획서 승인 및 용역착수보고 검토 보완사항 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 시설 업무 제2018-173호(2018.04.10.)와 관련,『서울로7017 정밀안전진단용역』과업수행계획서 검토결과 아래와 같이 승인함을 알려드리며

3. 용역착수보고(2018.4.13.) 검토 보완사항을 붙임과 같이 알려드리니 철저한 현장조사와 면밀한 검토를 통해 내실있는 정밀안전진단이 이루어 질수 있도록 과업수행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

가. 예정공정표에 의거 과업을 충실히 수행하시기 바라며, 예정공정표에 의거 10%이상 지연 될 경우 공정만회 대책과 새로운 예정공정표를 작성 제출후 검토 받으시기 바람

나. 과업수행시 특이사항 및 긴급상황 발생 할 경우 발주기관에 즉시 보고하고 발주기관의 지시에 의거 처리 하시기 바람(비상연락 체계유지)

다. 외관조사 등 교통통제 및 타기관의 협의가 필요한 경우 발주기관과 사전협의 후 시행 하시기 바라며, 시설물 점검전 점검복장 확인 및 안전교육 실시후 점검을 시행할 것

라. 현장재료 시험 계획서에 의거 정확히 시행하시기 바라며, 반드시 외관조사망도에 시험 위치를 표기하기 바람

마. 내진성능평가는 별도의 공정표 제시 및 추진계획 수립하여 시행할 것.

붙임 : 용역착수보고 검토 및 보완사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	정성민		강북일반교량팀장	손창익		교량안전과장	04/18 한유석
협조자
시행	교량안전과-6809	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1969	/전송	02-2133-1429	/	phj4ever@seoul.go.kr	/	대시민공개