투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	『영동대로 지하공간 복합개발』관련 기본설계용역 설계변경시행(1차)

1. 도시철도계획부-3123호(2018.4.12.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진 중인 「영동대로 지하공간 복합개발」기본설계 용역과 관련하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 :「영동대로 지하공간 복합개발」관련 강남권 광역복합환승센터 기본설계 용역

- 용역기간 : 2018.2.28 ∼ 2019.2.27(12개월)

- 용역금액 : 17,582,069,120원

- 용역업체 : 정림건축 컨소시엄

나. 설계변경 내역                                                       (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감
공급가액	15,983,699,200	15,882,899,200	감100,800,000
부가가치세	1,598,369,920	1,588,289,920	감10,080,000
계	17,582,069,120	17,471,189,120	감110,880,000

다. 변경사유 : 지하안전관리에 관한 특별법 제24조에 따라 사업의 시행은 설계용역과 분리계약토록 규정하고 있어 별도 용역 발주 시행하고자 함

라. 예산과목 : 지역발전본부, 도시재생 및 공공개발, 국제교류복합 공간 육성, 영동대로 지하공간 복합개발, 시설비(210-401-01)

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 설계변경 합의각서 1부.  끝.

주무관	이상원		주무관	윤득근		영동대로복합개발과장	김동철		도시철도계획부장	04/18 김진팔
협조자	주무관	이상훈		경리과장	최정수		기획예산과장	안순봉
시행	도시철도계획부-3317	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 10층	/
전화	02-772-7194	/전송	02-772-7304	/	wonlee2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)