문서번호	시설관리과-11310
결재일자	2018.4.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이승환	한상근	04/19 허준행
협 조

계약심사 결과 및 공사시행 계획

( 2018년 정릉동 등 10개동 상수도공사 )

2018. 04.

중부수도사업소

계약심사 결과 및 공사시행 계획

( 2018년 정릉동 등 10개동 상수도공사 )

「2018년 정릉동등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 본부 계약심사를 완료하고 심사결과에 따라 공사시행코자 함

□ 심사요청 개요

○ 공 사 명 : 2018년 정릉동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사위치 : 성북구 정릉동 등 10개동 일대

○ 공사기간 : 착공일로부터 2019.06.30일까지

○ 공사개요 : D=20~300mm, L=1,722m 상수도관 부설

○ 도 급 비 : 금776,498,000원

□ 계약심사 결과내용

○ 관련문서 : 본부 재무회계과-5204(2018.04.18.)호 「설계심사 결과 통보」

○ 계약심사 결과 금액                                       (단위 : 원)

구 분	계약심사의뢰금액	심사결과 금액	증 ․ 감
총공사비	956,498,000	937,350,000	-19,148,000
도급비	776,498,000	757,350,000	-19,148,000
관급비	180,000,000	180,000,000	변동없음

○ 단가조정

- 파쇄물운반, 잔토소운반 인력상차 시간 조정

- 되메우기(환토) 인력(주간, 야간) 공종 신설

- 부지임대료 조정 : 평균공시지가 → 최저공시지가 적용

○ 주요 수량조정

- 되메우기(환토) 인력 수량만 소운반 및 상차 적용

- 대형계량기 설치공, 대형계량기실 설치공 수량 일치

- 부단수할정자관 사급자재와 시공 수량 일치

- 배관탐지공 : 88개소 → 5개소

- 관급자재운반량(보호통, 직관)과 시공 수량 일치

- 고재처리량과 철거자재운반 수량 일치

□ 계약심사 결과검토

○ 심사결과 적정함

- 현재 물가기준에 의거 자재단가에 반영된 사항이며, 내역서 공종 및 수량 조정은 적정한 사항으로 위 심사 결과를 반영하여 공사시행코자 함

□ 공사발주 계획

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 상하수도 설비공사업 면허 소지자로 서울특별시에 주된 사무소가 있는자

○ 발주금액 : 금1,187,350,000원 (도급비 금757,350,000원)        (단위 : 원)

구 분	발주 금액	비고
총공사비	1,187,350,000
도급비	757,350,000
관급비	180,000,000
복구비 및 기타	250,000,000

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설설치 및 보수

□ 행정사항

○ 「2018년 정릉동등 10개동 상수도공사」 공사시행 후 본청 재무과에 계약의뢰

붙임 : 1. 계약심사 결과 공문 1부.

2. 물량내역서(검토완료) 1부.  끝.