문서번호	토목부-6829
결재일자	2018.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
노순재	박용택	04/19 김영수
협 조

설계변경(전체5회, 3차1회) 검토 보고

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 -

2018. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

설계변경(전체5회, 3차1회) 검토 보고

- 동부간선도로확장공사(3공구) -

본 공사와 관련 월계역사 연장 추가 공사 반영에 따른 전체 5회

및 3차(1회)에 대한 설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고임.

【관련근거: 대한(감본) 2018-66호(2018.04.16.)】

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

○ 공사규모 : 보행교량 설치(폭4.5m, 연장 191m)

○ 도 급 비 : 6,454백만원(3차: 1,814백만원)

○ 공사기간 : ′16.4.29. ~ ′18.04.28.

○ 시 공 사 : 한양산업개발㈜

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트

□ 설계변경 및 주요내용

○ 전체분(5회), 3차(1회) 설계변경 현황               (금액 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 . 감	비고
전 체 (5회)	도 급 액	6,454,822	8,084,230	증) 1,629,408
	공사기간	2016.04.29. ~ 2018.04.28.	2016.04.29. ~ 2018.11.30.	증) 216일
3 차 (1회)	도 급 액	1,814,700	3,444,108	증) 1,629,408
	공사기간	2018.01.22. ~ 2018.04.28.	2018.01.22. ~ 2018.11.30.	증) 216일

○ (전체 5회 및 3차 1회) 설계변경 및 공기연장 사유

- 월계역사 연장공사 방침 및 설계․계약심사 완료에 따른 설계 반영

- 월계역사 연장에 따른 추가 공사기간(216일) 필요

○ 주요 설계변경 내용(월계역사 연장 반영)               (단위: 천원)

공 종		단위	전 체			금 회(3차)
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
1.배수공	터파기	㎥	-	136	136	-	136	136
	되메우기 및 다짐	㎥	-	100	100	-	100	100
	흄관 부설 및 접합	m	-	47	47	-	47	47
2.포장공	보조기층 포설	㎡	-	64	64	-	64	64
	아스팔트 포설	a	-	3	3	-	3	3
	아스팔트 절단	m	-	148	148	-	148	148
3.부대공	차선도색	㎡	-	22	22	-	22	22
	신호수	일	-	100	100	-	100	100
	안전휀스설치	m	-	40	40	-	40	40
	사토운반	㎥	-	102	102	-	102	102
	폐기물 처리	ton	-	259	259	-	259	259
4.구조물공	강교제작	ton	-	46.141	46.141	-	46.141	46.141
	터파기	㎥	-	234	234	-	234	234
	되메우기 및 다짐	㎥	-	116	116	-	116	116
	콘크리트 타설	㎥	-	179	179	-	179	179
	거푸집	㎡	-	434	434	-	434	434
	철근가공조립	ton	-	25	25	-	25	25
	강관말뚝	m	-	171	171	-	171	171
	마이크로파일	m	-	177	177	-	177	177
5.부대공	콘크리트 깨기	㎥	-	70	70	-	70	70
	콘크리트 천공	m	-	122	122	-	122	122
	수목이식	주	-	70	70	-	70	70
6.건축공사	월계역사 연결	식	-	1	1	-	1	1

※ 당초 구간 설계변경 : 변경내용 없음

공 종		단위	전 체			금 회(3차)
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
1.토공	터파기	㎥	1,779	1,779	-	-	-	-
	되메우기 및 다짐	㎥	1,193	1,193	-	-	-	-
	사토운반	㎥	459	459	-	459	459	-
	사석채움	㎥	1,308	1,308	-	1,308	1,308	-
2.교량공	강교제작(본선부)	TON	161.357	161.357	-	-	-	-
	강교제작(아치부)	TON	105.868	105.868	-	-	-	-
	강교제작(접속부)	TON	117.263	117.263	-	-	-	-
	강교제작(계단부)	TON	56.129	56.129	-	56.129	56.129	-
	콘크리트타설	㎥	995	995	-	11	11	-
	거푸집	㎡	1,208	1,208	-	31	31	-
	강관비계	㎥	1,368	1,368	-	-	-	-
	철근가공 및 조립	TON	126.949	126.949	-	-	-	-
3.부대공	엘리베이터 설치	개소	3	3	-	3	3	-
	투석방지망	m	214	214	-	214	214	-
	교량배수시설	m	34	34	-	34	34	-
	가도 쌓기	㎥	1,690	1,690	-	338	338	-
	난간설치	m	562	562	-	562	562	-
	마대쌓기및헐기	개	2,357	2,357	-	2,357	2,357	-

○ 공사비 변경 현황(전체5회)                              (단위:천원)

구 분	단 위	당 초	변 경	증 감	비 고
1. 토 공	식	46,551,590	46,551,590
2. 교 량 공	식	2,942,018,189	2,942,018,189
3. 부 대 공	식	1,175,519,009	1,175,519,009
4. 사급자재비	식	117,565,104	117,565,104
5. 월계역사연장공사	식	-	1,105,846,972	증 1,105,846,972	계약심사1건 (월계역사 연장공사)
직접공사비		4,281,653,892	5,387,500,864	증 1,105,846,972
간접공사비		1,370,787,744	1,730,532,590	증 359,744,846
정기안전점검		38,200,000	38,200,000	-
시공상세도작성비		13,742,000	13,742,000	-
설계용역비		163,636,364	163,636,364	-
수탁안전점검비		-	15,688,182	증 15,688,182
부가가치세		586,802,000	734,930,000	증 148,128,000
도 급 비		6,454,822,000	8,084,230,000	증 1,629,408,000

○ 공사비 변경 현황(3차 1회)                               (단위:천원)

구 분	단 위	당 초	변 경	증 감	비 고
1. 토 공	식	20,712,680	20,712,680
2. 교 량 공	식	850,453,730	850,453,730
3. 부 대 공	식	286,104,992	286,104,992
4. 사급자재비	식	1,021,021	1,021,021
5. 월계역사연장공사	식		1,105,846,972	증 1,105,846,972
직접공사비		1,158,292,423	2,264,139,395	증 1,105,846,972
간접공사비		448,892,849	808,637,695	증 359,744,846
정기안전점검		28,800,000	28,800,000
설계용역비		13,742,000	13,742,000
수탁안전점검비			15,688,182	증 15,688,182
부가가치세		164,972,728	313,100,728	증 148,128,000
도 급 비		1,814,700,000	3,444,108,000	증 1,629,408,000

※ 증)1,629,408천원=계약심사 1,522,327천원+계측비 107,081천원(심사제외)

□ 조치의견

○ 중랑천 초안산 앞 보행교량 월계역사 연장 계약심사 결과를 반영한 설계

변경 관련 감리단 검토 의견이 타당하여 계약금액 및 공사기간을 변경

조정코자 함.

붙임 : 1. 감리단 검토 의견서 및 설계변경(공기연장) 사유서 각1부.

2. 설계변경 내역(전체5회, 3차1회) 각1부.

3. 계약심사 서류 각 1부. 끝.