투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공 및 납품기한 연기 요청[세종대로 역사문화 특화공간 조성 기계공사 ]

1. 정림 역사문화 18-253(2018.04.20)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인「세종대로 일대 역사문화 특화공간조성 기계설비공사」관련기계공사 및 관급자재의 준공(납품)기한을 연기 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기내용

구 분	차수	계약금액	준공(납품)기한			계약번호	비고
			당 초	변 경	연장(일)
기계공사	총차	695,682,000	‘18.04.25	‘18.10.05	증)163	20161158659	공사
	1차	200,000,000	‘18.04.25	‘18.08.31	증)128
	2차	495,682,000	‘18.04.25	‘18.10.05	증)163
TAB용역		18,315,110	‘18.04.30	‘18.10.05	증)168	20170232984	용역
승강기	총차	303,738,000	‘18.04.25	‘18.10.05	증)163	12162274000	관급
	1차	33,000,000	‘18.04.25	‘18.10.05	증)163
	2차	270,738,000	‘18.04.25	‘18.10.05	증)163
지열시스템	총차	345,000,000	‘18.05.25	‘18.10.05	증)163	12162261100	관급
	2차	158,922,250	‘18.04.25	‘18.10.05	증)163
원심펌프		29,312,000	‘18.04.30	‘18.10.01	증)154	201710B97901	관급
전기히트펌프		5,213,300	‘18.04.30	‘18.10.01	증)154	1217246306	관급
공기순환기		10,053,440	‘18.04.30	‘18.10.01	증)154	1217246419	관급
항온항습기		65,704,000	‘18.04.30	‘18.10.01	증)154	1217246114	관급
빌딩자동제어장치		163,000,000	‘18.04.30	‘18.10.05	증)168	12172172400	관급

나. 준공기한 연기사유

- 선행공정 건축공사 연기에 따른 기계설비공사 시기 미도래

다. 귀책소재 : 도시기반시설본부

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 준공(납품)기한 연기검토 보고서 1부.

2. 합의각서 9부. 끝.

	설비부장
주무관	이호기		환경설비과장	여인웅		설비부장	04/20 권오식
협조자
시행	설비부-5362	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개