위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	가양대교 정밀안전진단 용역 변경계약 의뢰

1. 교량안전과-6938호(‘18. 4. 19)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행 중인 “가양대교 정밀안전진단 용역”에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 가양대교 정밀안전진단 용역

- 용역기간 : ‘17. 6. 30. ~‘18. 4. 25.

- 계 약 자 : 한국시설안전공단

- 계약금액 : 금560,800,000원(금오억육천팔십만원)

나. 변경내용

구 분	당 초	변 경	사 유
계약기간	‘17. 6. 30. ~‘18. 4. 25	‘17. 6. 30. ~‘18. 5. 31.	건설기술심의 결과 반영을 위한 절대공기 부족
계약금액	560,800,000원	변경없음	-

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝

	교량안전과장
주무관	김대희		기술점검팀장	박영권		교량안전과장	04/20 代박동욱
협조자
시행	교량안전과-6984	(		)	접수		(		)
우	04524		/
전화	02-2133-8078	/전송	02-2133-0763	/	kdhlife@seoul.go.kr	/	대시민공개