투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	중랑천 초안산앞 보행교량 설치 전기공사 계약변경 및 공사기간 연장 의뢰

1. 설비부-5228(2018.04.19.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진중인 『중랑천 초안산앞 보행교량 설치 전기공사』와 관련하여 아래와   같이 계약변경 및 공사기간 연장을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑천 초안산앞 보행교량 설치 전기공사

나. 계 약 자 : ㈜화성이엔에프 대표 김선화

다. 변경사항

변경내용	구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
계약금액	총 차	315,183,000원	363,310,000원	증 48,127,000원
	2 차	165,183,000원	213,310,000원	증 48,127,000원
공사기간	총 차	‛17.03.24.~‛18.04.30.	‛17.03.24.~‛18.11.30.	증 214일
	2 차	‛18.01.24.~‛18.04.30.	‛18.01.24.~‛18.11.30.	증 214일

라. 변경사유

- 교량 연장(L=60m) 및 현장여건에 따른 내역변경

- 선행공종(토목공사) 공사기간 연장에 따른 준공기한 연장

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 변경도서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	손영일		시책사업과장	임병국		설비부장	04/20 권오식
협조자	경리과장	代김용범
시행	설비부-5363	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8650	/전송	02-3708-8659	/	zerone@seoul.go.kr	/	부분공개(5)