투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 계약수량 변경 및 납품기한 연기 요청

1. 설비부-5228(2018.04.19.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행하고 있는 『중랑천 초안산앞 보행교량설치 전기공사』에 소요되는 관급자재에 대해 아래와 같이 계약수량(금액) 변경 및 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 변경내용 (※붙임 세부내역 참조)

건 명	납품요구번호	계약금액 (조달수수료 별도)		납품기한		비고
		당초	변경	당초	변경
LED경관조명기구	12-17-1 -66100-00	41,454,000원	51,156,000원	’18.04.30.	’18.11.30.
영상감시장치	12-17-2 -38664-00	23,125,000원	27,697,000원	’18.04.30.	’18.11.30.

나. 계약업체

- LED경관조명기구 : 인스엘이디(주) 대표 조주희

- 영상감시장치 : 이노뎁(주) 대표 이성진

다. 연기사유 : 교량연장에 따른 물량증가 및 설치시기 미도래

라. 계약금액 및 수량 : 변경없음

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 관련보고서 1부.

2. 변경 세부내역서 1부.

3. 합의각서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	손영일		시책사업과장	임병국		설비부장	04/20 권오식
협조자	경리과장	代김용범
시행	설비부-5359	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8650	/전송	02-3708-8659	/	zerone@seoul.go.kr	/	부분공개(5)