문서번호	설비부-5383
결재일자	2018.4.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
김현욱	여인웅	04/23 권오식

『천호대로(광나루역)확장 전기공사』

실정보고 사항 검토 보고

2018. 4.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『천호대로(광나루역)확장 전기공사』

실정보고 사항 검토 보고

「천호대로(광나루역)확장 전기공사」지하차도 상부 경관개선부분 공사 시행중 현장여건 변경에 따른 실정보고가 있어 이를 검토하고 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

천호수 제2018-163호(2018.04.16.), 실정보고(경관개선 변경) 승인 요청

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『천호대로(광나루역)확장 전기공사』

공사위치 : 서울시 광진구 구의동 58-15~광장동 388-10

공사기간 : 2011. 06. 16. ~ 2018. 06. 30.

공사내용 : 지하차도 조명등 및 가로등 설치공사 1식, 경관개선공사 1식

도 급 비 : (총차)1,399백만원, (7차)682백만원

시 공 사 : ㈜거성전설 대표 공병준

감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

Ⅲ		검토내용

실정보고 사유

□ 천호대로(광나루역) 확장 전기공사 지하차도 상부 경관개선 부분 현장여건 변경에 따른 실정보고

- 가로등 분전함 및 경관조명등 일부 자재구입 변경(관급자재 → 사급자재)

- LED조명등 SMPS 구성방법 변경(개별 구성 → 집합 구성)

SMPS(Switched Mode Power Supply) : LED조명등 전원공급장치

주요물량 변경 사항

품 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
강제전선관	36mm	m	190	0	감)190
접 지 선	6㎟	m	1,283	952	감)331
전력케이블	F-CV 2C × 2.5㎟	m	0	418	증)418
전력케이블	F-CV 2C × 16㎟	m	219	0	감)219
전력케이블	F-CV 2C × 25㎟	m	0	219	증)219
경관조명제어반	600*900*200	면	0	1	증)1
가로등 분전함	5회 및 6회로	면	0	2	증)2
LED투광등	LED 150W	EA	0	6	증)6

관급자재 변경 사항

품 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
경관조명제어반	600*900*200	면	1	0	감)1
가로등 분전함	5회 및 6회로	면	2	0	감)2
LED투광등	LED 150W	EA	6	0	감)6

공사비 변경 사항

구 분	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
직접공사비	천원	33,120	49,317	증)16,197
간접공사비	천원	29,228	33,084	증)3,856
도 급 비	천원	62,348	82,401	증)20,053
관 급 비	천원	99,287	85,827	감)13,460
총 공 사 비	천원	161,635	168,228	증)6,593

감리단 검토의견

□ 천호대로(광나루역) 확장 전기공사의 지하차도 상부 경관계선 전기공사의 현장 여건 변경으로 인한 공사비 변경은 적정하다고 사료됨.

Ⅳ		조치의견

책임 건설사업관리 기술자가 검토한 실정보고 내용이 적합한 것으로       판단되어 실정보고 사항을 승인하고, 증액되는 공사비는 향후 설계변경시       반영하고자 함.

붙임  실정보고(감리단) 1부.  끝.