투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	시설관리과장
(경유)
제목	뚝섬전망문화복합시설 외벽 긴급보수공사 추가작업지시 의뢰

1. 운영총괄과-2685(18.4.20)호「뚝섬전망문화복합시설 외벽 긴급보수공사 현장 합동점검 보고」와 관련입니다.

2. 외장 마감재 일부절단에 따라 처짐현상이 확대되어 아래와 같이 추가로 작업지시를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 뚝섬전망문화복합시설 외벽 긴급보수공사

나. 추가작업지시 사항

- 처짐확대에 따른 추가작업공간(가설비계) 확보

- 유압잭을 활용한 외부마감재 직결나사 설치

다. 추가 소요예산 : 금37,017,000원(금삼천칠백일만칠천원)

라. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 하천시설 유지관리 및 개선, 시설비(100-401-01)

※ 뚝섬전망문화복합시설 외벽 긴급보수공사 총 소요액 : 금192,532,430원

구 분	금 액	예산과목	비고
계	192,532,430
당초	147,000,000	치수 및 하천관리, 응급복구, 시설비	기존예산액
	8,515,430	뚝섬전망문화복합시설 운영 및 관리, 공공운영비
추가	37,017,000	한강공원 하천시설 유지관리 및 개선, 시설비	추가소요액

첨부 : 점검결과 보고서(방침), 점검결과 의견서, 산출내역서 각 1부.  끝.

	운영총괄과장
주무관	이경춘		운영총괄과장	04/23 代김용광
협조자	주무관	심옥경
시행	운영총괄과-2694	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 운영총괄과(2층) (성수동1가)	/
전화	02)3780-0814	/전송	02)3780-0803	/	britze@seoul.go.kr	/	부분공개(5)