문서번호	시설과-2354
결재일자	2018.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		주무관		시설과장
전성완		이춘한		전결 04/23 오임석
협 조

서울대공원 황새마을 시설개선 전기공사

예비준공검사 실시 계획

2018. 4.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

서울대공원 황새마을 시설개선 전기공사

예비준공검사 시행 계획

“서울대공원 황새마을 시설개선 전기공사” 에 대하여 예비준공검사를  아래와 같이 시행코자 함

1		관련근거

○ 예비준공검사 이행실태 점검결과 개선대책 보고

(기술심사담당관-8908, 2013.5.20.)

2		공사개요

○ 사 업 명: 서울대공원 황새마을 시설개선 전기공사

○ 사업기간: 2017. 10. 23. ~ 2018. 4. 30.

○ 사업내용

- 분전반 1면 교체, 어닝 전원선 및 배관배선 1식

- 외부 조명등 4본 설치 및 관련 배관배선

- 전등, 전열설비 및 기타공사 1식

○ 계 약 자: 주식회사 대웅파워텍 대표 이숙경

○ 계약금액: 85,855천원

○ 감 리 사: 신한전설(주) 대표 최광일

3		진행상황

○ ‘17. 10. 23: 계약 및 착공

○ ‘17. 11.  2: 감리 계약 및 착수

○ ‘17. 12. 14: 준공기한 연기(’17.12.30 → ‘18.3.31)

○ ‘18.  3. 20: 준공기한 연기(’18.3.31 → ‘18.4.30)

○ ‘18.  4. 30: 준공(예정)

※ 현 공정률 80%

4		준공검사 개요

○ 검사일시: 2018. 4. 24.(화) 10:00

○ 검 사 자

- 발주처: 시설과 전기시설팀 7급 허용석, 7급 김희원

- 상주감리원 신한전설㈜ 강태산

○ 검사방법: 예비준공검사 점검표(붙임)에 의거 현장 확인 점검

○ 검사내용

- 설계도면에 의거 시공의 적정 여부 및 보완사항

- 기 시공 구간 하자발생 여부 등

5		행정사항

○ 검사결과 미비사항 및 보완이 필요한 사항이 발견될 경우 문제점       해결후 준공처리

붙임  예비 준공검사 점검표 1부.  끝.