	서울특별시도시기반시설본부
수신자	토목부장
(경유)
제 목	변경계약 체결통보[중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사]

1. 토목부-6911(2018.4.20)의 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 [중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사] 계약건에 대하여 붙임과 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 변경계약 체결현황

(단위:원)

구 분	당 초		변 경
	총차	3차	총차	3차
계 약 자	한양산업개발㈜		변경없음
계약금액	6,454,822,000	1,814,700,000	8,082,230,000	3,444,108,000
준공기한	2018.04.28	2018.04.28	2018.11.30	2018.11.30

붙임  변경계약서 1부.  끝.

	건설총괄부장
주무관	김용범		경리과장	代김용범		건설총괄부장	04/23 정진일
협조자
시행	건설총괄부-7542	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2374	/전송	02-3708-2327	/	kim389@seoul.go.kr	/	부분공개(6)