문서번호	토목부-6972
결재일자	2018.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
노순재	代남만조	04/23 김영수
협 조

설계변경(전체1회) 검토 보고

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설폐기물 처리용역-

2018. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

설계변경(전체1회) 검토 보고

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설폐기물 처리용역 -

월계역사 연장 추가 공사에 따른 물량변경 및 공기연장에 따른

폐기물 처리용역 설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고임.

【관련근거: 대한(감본) 2018-68호(2018.04.19.)】

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역규모 : 폐기물 운반 및 처리 406톤

○ 도 급 비 : 9,000천원

○ 용역기간 : ′16.9.30. ~ ′18.04.28.

○ 용 역 사 : ㈜방태

□ 설계변경 및 주요내용

○ 전체분(1회)                                          (금액 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 . 감	비고
전 체 (1회)	도 급 액	9,000	14,531	증) 5,531
	용역기간	2016.09.30. ~ 2018.04.28.	2016.09.30. ~ 2018.11.30.	증) 216일

○ (전체 5회 및 3차 1회) 설계변경 및 공기연장 사유

- 월계역사 연장공사 설계반영에 따른 폐기물량 증가

- 월계역사 연장공사 기간 연장에 따른 추가 용역기간(216일) 필요

○ 주요 설계변경 내용(월계역사 연장공사 폐기물 반영)

구 분	발생구간 (위치)	폐기물 종류	폐기물 수량 (ton)			관련근거
			당초	변경	증·감
-월계역사 연장설계에 따른 폐기물 발생	보도 및 주차장 등	폐콘크리트	297	474	증) 177	계약심사 결과 (월계역사 연장) 설계반영 지시 도시기반시설본부-18-2023 (2018.03.06.)
		폐아스콘	109	191	증) 82

○ 공사비 변경 현황(전체1회)

공 종		수량		금 액 (전체분)		증.감	비 고
		당초	변경	당 초	변 경
폐기물 운반	- 폐콘크리트(ton)	297	474	2,062,924	3,292,344	증) 1,229,420	L= 30.0km 이내
	- 폐아스콘(ton)	109	191	710,539	1,245,074	증) 534,535
	- 일반관리비(%)	10	10	277,346	453,741	증) 247,449
	- 이 윤(%)	10	10	292,880	497,381	증) 176,395
폐기물 처리	- 폐콘크리트(ton)	297	474	4,838,130	7,721,460	증) 2,883,330
	- 폐아스콘(ton)	-	-	-	-	-
용 역 비	공급가액			8,181,819	13,210,000	증) 5,028,181
	VAT			818,181	1,321,000	증) 502,819
	도급금액			9,000,000	14,531,000	증) 5,531,000
용 역 기 간(전체)				‘16.09.30. ~ ‘18.04.28	‘16.09.30. ~ ‘18.11.30	증)216일

□ 조치의견

○ 중랑천 초안산 앞 보행교량 월계역사 연장 추가공사에 따른 폐기물 신규

물량을 반영한 설계 변경 관련 감리단 검토 의견이 타당하여 계약금액

및 공사기간을 변경 조정코자 함.

붙임 : 1. 감리단 검토 의견서 각 1부.

2. 설계변경 내역(전체1회) 각1부.

3. 합의각서 1부. 끝.