문서번호	도시철도설비부-3896
결재일자	2018.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		신호과장		도시철도설비부장
박지웅		구봉서		전결 04/24 구자훈
협 조

	『하남선 5호선연장 신호시스템 본선 및 관제센터 제작구매 설치』 제작승인요청도서 검토결과 보고

2018. 04.

도기시반시설본부

도시철도설비부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	서울교통공사 협의
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『하남선 5호선연장 신호시스템 본선 및 차량기지 제작구매 설치』

제작승인요청도서 검토결과 보고

『하남선 5호선연장 신호시스템 본선 및 관제센터 제작구매 설치』의 제작승인요청도서 검토를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		제작승인요청도서 검토 개요

대 상 : 『하남선 5호선연장 신호시스템 본선 및 관제센터 제작구매 설치』의           제작승인요청도서

제작승인요청도서 검토일시

▶ 제1차 제작승인요청도서 검토 : 2018. 03. 20.(수) 15:00 ~ 17:00

▶ 제2차 제작승인요청도서 검토 : 2018. 03. 29.(목) 15:00 ~ 18:00

▶ 제3차 제작승인요청도서 검토 : 2018. 04. 05.(목) 14:00 ~ 16:30

제작승인요청도서 검토자

연번	소속	직위	성명	비고
1	도시철도설비부	신호과장	구봉서	03.20. 04.05.
2		주무관	박지웅	03.20. 03.29. 04.05.
3	서울교통공사(신호처)	부장	진수봉	03.20. 03.29. 04.05.
		차장	권영오
4
		과장	이근기
5
6	서울교통공사(제2종합관제센터)	부장	홍광표
7		차장	조경수
8	서울교통공사(신호2사업소)	차장	유전상	03.20. 03.29.
9		과장	채상병	03.29.
10	대아티아이(주)	부장	정상찬	03.20. 03.29. 04.05.
11		과장	이창수
12		대리	이정헌
13		대리	이윤상	03.29. 04.05.

Ⅱ		제작승인도서 검토결과

검토결과(요약)

▶ 질의사항 8건, 요청사항 60건(수용 44건, 조건부 수용 5건, 기수용 3건, 수용불가 8건)

※ 자세한 사항은 붙임문서의 『요청사항 및 검토의견 목록』 참조

연번	검토결과	질의 및 요청사항	수용조건 및 불가사유
1	답변완료	제시한 임시속도제어는 기존구간에서 구현 불가능	제시한 사양에서 기능삭제
2		제시한 출발억제는 기존구간에서 구현 불가능	제시한 사양에서 기능삭제
3		제시한 임시속도상테억제는 기존구건에서 구현 불가능	제시한 사양에서 기능삭제
		위 건외 5건
1	수용	L/S 표시방안 조정	관제운영부서에서 의견이 합의된 표시 기준안을 정하여 재요청할 것
2		PSD 상태 표시	연장구간만 표시, 기존 구간은 아이콘만 제공
3		휴먼 에러 방지 경고 기준 조정	프로그램 시연 후 요구사항 반영
4		전자연동장치 고장시에도 궤도점유 및 열차이동 표시할 것	기존 LDTS의 Code chart 병행 처리방식 검토 후 수용
5		진로명을 연동도표 기준으로 통일	최종 연동도표기준으로 진로명 표기
6		메모 저장/삭제는 운영자탁, 관리는 TTC에서 수행하도록 구현	관제사 의견 수렴 후 추가협의 필요 (MCS에서 제어하는 방안 검토)
		위 건외 38건
1	조건부 수용	시민서비스와 인터페이스 구축	기 구축 인터페이스인 경우 수용
2		기관사 안내장치와 인터페이스 구축	기 구축 인터페이스인 경우 수용
3		회차 개소의 TWC를 차량 전두부, 후두부에 각각 분리 구성	공급물량 및 공사 비용이 추가되는 부분으로 설계변경 확정시 논의하여 수용
		위 건외 2건
1	기수용	정차시간제어 표준시각 설정 기능 필요	정차시간제어 표준시각 설정에 기능이 존재함
2		버튼 취급시 확인절차 기능 추가	버튼 취급시 확인절차 기능이 존재함
		위 건외 1건
1	수용불가	DLP 항온 항습기 설치 요청	RFP에 관련 내용이 없으며 냉방기가 설치되므로 수용불가
2		보안성 검토 관련 로그관리서버 추가요청	보안성 문제로 로그 저장은 MC 또는 자원관리서버에 저장함. (관리서버 신설시 추가 계약필요)
3		관제정보전송장치 제어기능 서버에 포함	CDTS는 철거대상으로 수용불가
4		전자연동장치 고장시에도 LCC L/S 화면에 궤도점유 및 열차이동 표시할 것	대안제시(TLDS 화면활용)
		위 건외 4건

Ⅲ		제작승인요청도서 조건부 승인

조건부 승인사유

▶ 하남선 개통일정에 맞추기 위하여 물품제작에 필수 승인대상이 아닌 조건부 수용사항(일부 수용사항)에 대하여 차후 보완 및 협의를 조건으로 승인하고자 함.

▶ 조건부 승인내용

연번	검토결과	질의 및 요청사항	수용조건 및 불가사유
1	조건부 수용	시민서비스와 인터페이스 구축	기 구축 인터페이스인 경우 수용
2		기관사 안내장치와 인터페이스 구축	기 구축 인터페이스인 경우 수용
3		회차 개소의 TWC를 차량 전두부, 후두부에 각각 분리 구성	공급물량 및 공사 비용이 추가되는 부분으로 설계변경 확정시 논의하여 수용
4		5호선 운영방식에 맞추어 연동도표 수정 요청	기존 5호선(1단계 개통구간 : 상일동 ~ 왕십리)과 유사하게 설계하며, 안전과 열차운행에 문제가 되지 않도록 조정 필요시 운영사(서울교통공사), 설계사(경인기술), 제작사(대아티아이) 및 감리와 협의하여 조정한다.
5		신규 선로전환기 제어계전기(WR)를 자기유지계전기로 구성요청	상일동역 병행운전 방안 검토 후, 수용
6	수용	L/S 표시 방안 조정	신호처에서 사업소의 의견이 합의된 기준안을 정하여 재요청 할 것
7		전자연동장치 고장시에도 궤도점유 및 열차이동 표시할 것	기존 LDTS의 Code chart 병행 처리 방식 검토 후, 수용
8		궤도별 속도코드 개요도면 요청	준공도면 제출시 제공
9	기타	기타 현안사항 및 향후 최신 변경 법규 재적용 사항

Ⅳ		향후 일정

2018. 04. 24. : 제작승인요청도서 조건부 승인

2018. 05. 25. : 제작승인도서 제출[대아티아이(주) → 도기본]

붙임  1. 요청사항 및 검토의견 목록 1부.

2. 제작승인요청도서 검토회의 각1부.

3. 회신문[서울교통공사, 대아티아이(주)] 각1부.  끝.