투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	슬러지건조시설 설치공사 기계관급자재 입찰 및 계약추진 현황 보고

1. 슬러지건조시설 설치공사의 원활한 추진을 위하여 공법기자재인 건조시설은 `17.11월에 조달계약요청하여 `17.12.4. 계약체결을 하였습니다.

2. 또 제작기간이 약 3개월 가량 소요되는 기기재 6대 (*************************************)는 `18. 2. 6. 조달발주를 요청하였으며 나머지 관급자재 ***는 `18. 3.26.까지 모두 조달발주하였습니다.

3. 그 간 신속한 입찰공고 및 계약 추진을 위하여 서울지방조달청 각 담당자들과 여러차례 유선통화 및 서면으로 독촉을 실시하였으나 타 공공기관들의 조기 발주 물량이 한꺼번에 몰리면서 입찰 및 계약 업무 과중, 서울지방조달청 장비구매과 인사이동, 업체들 이의신청 등의 사유로 입찰 및 계약체결이 지연되고 있는 상황입니다.

4. 이에 다시 한번 인터넷 나라장터에서 사전규격공고 및 입찰진행 상황을 확인하고 지연 물품들에 대하여 서울지방조달청 각 담당자들과 전화통화하여 조속한 입찰추진을 요청하였기에 그 결과를 붙임과 같이 보고드립니다.

붙임  기계관급자재 입찰 및 계약 추진 현황  1부.

★주무관	윤정		시설보수과장	윤승범		중랑물재생센터소장	04/24 이성재
협조자
시행	시설보수과-2051	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동) 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2564	/전송	02-2211-2579	/		/	부분공개(5)