투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	종로 중앙버스전용차로 설치공사 폐기물처리용역 준공기한 연기 계약의뢰

1. 토목부-7017호(2018.4.23.)와 관련임.

2. 우리 본부에서 시행중에 있는 “종로 중앙버스전용차로 설치공사 페기물처리용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 종로 중앙버스전용차로 설치공사 페기물처리용역

나. 위  치 : 세종대로사거리 ~ 동묘앞

다. 도급자 : 유한회사 도성개발

라. 감리사 : 제일엔지니어링 1사

마. 준공기한 연기 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
공사기간	‘17. 8.29.∼‘18.04.30.	‘17. 8.29.∼‘18.06.30.	증) 2개월
도급비	521,065,000	521,065,000	변경없음

바. 귀책소재

1) 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음.

2) 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 사 유 : 선행공종인 토목 준공기한 연기에 따라 준공 기한 연기

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 감리검토서 1부.

3. 합의각서 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이한규		광역도로과장	여용석		토목부장	04/24 김영수
협조자
시행	토목부-7113	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2556	/전송	02-3708-2599	/	lhg2023@seoul.go.kr	/	대시민공개