문서번호	기반시설과-1117
결재일자	2018.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기반시설과장	시설부장		한강사업본부장
김일문	박일연	최진석		04/24 윤영철
협 조	총무과장		박병현
	기획예산과장		김건태

준공기한 연기보고

(풍납토성,나루터길나들목개선공사-1차)

2018. 4.

한강사업본부 기반시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	√
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	√
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	√
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	√
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	√
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	√
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	√
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	√	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	√

준공기한 연기보고

풍납토성·나루터길나들목의 접근성개선을 위하여 시행중인 개선

공사에 대하여 감리단으로부터 1차분 준공기한 연기요청이 있어 검토후 보고 합니다.

⇒ 신마포감2018-117(2018.4.23)

공사개요

❍ 공 사 명 : 풍납토성·나루터길나들목 개선공사(장기계속)

❍ 공사규모

나들목명	위 치	규 모(m)			비고
		폭	높이	길이
풍납토성나들목	송파구 암사동 풍납동 토성 인근	4.5	3.1	65.5	육갑문2개소
나루터길나들목	강동구 암사동 강변그대가 아파트 인근	8.0	3.5	81.0	육갑문2개소

❍ 공 사 비 : 총차 2,227,030천원(1차 1,241,760천원)

❍ 공사기간 : 2017. 11.3 ~ 2018. 12.31

❍ 시공사/감리단 : ㈜선광이엔씨,(주)수프로/ (주)삼안 외 2개사

변경내용

(단위:원)

구 분	총차 공사		1차 공사		비고
	당 초	변 경	당 초	변 경
도 급 비	2,227,030,400	2,227,030,400 (변경없음)	1,241,760,000	1,241,760,000 (변경없음)
공사기간	2017.11.3.~ 2018.12.30	2017.11.3.~ 2018.12.30. (변경없음)	2017.11.3.~ 2018.4.30	2017.11.3.~ 2018.9.30	5개월

준공기한 연기사유

❍ 국토관리청 하천점용허가 지연(신청 2017.8.16. → 허가 2017.12.12.)으로

인한 실착공 지연

❍ 금년 한파로 인한 동절기 지장물(전기 및 통신) 이설공사 지연

❍ 채광창 복개공사 후 제내지 차수벽 철거가능(신규공종)

※ 1차분 준공기한 연기 사항이며 전체 공정에는 지장없음

지체상금 부과여부: 미부과

조치의견

❍ 상기와 같은 내용으로 준공기한을 연기하여 공사추진에 철저를 기하고자 함니다.

붙임 : 관련문서 각 1부. 끝.