투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	폐기물 처리용역 설계변경 계약 의뢰(초안산 보행교량-1차)

우리본부에서 시행중인 『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설 폐기물 처리용역』에 대해 아래와 같이 설계변경(1차) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량설치공사 건설폐기물 처리용역

나. 도 급 비 : 9,000천원

다. 공사기간 : ‘16.09.30.∼’18.04.28.

라. 도 급 자 : ㈜방태

마. 예산과목

- 일반회계, 치수 및 하천관리, 하천 복원 및 정비, 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경(1차)                                           (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증. △감
전체 (1회)	도 급 액	9,000	14,531	증)5,531
	용역기간	2016.09.30 ~ 18.04.28	2016.09.30 ~ 18.11.30	증)216일

사. 설계변경 사유

- 월계역사 연장에 따른 폐기물 처리물량 증가 및 기간 연장

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 변경 내역서(1차) 및 합의각서 등 각 1부.   끝.

	토목부장
주무관	노순재		교량건설과장	박용택		토목부장	04/24 김영수
협조자
시행	토목부-7072	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/	fortuners@seoul.go.kr	/	대시민공개