문서번호	급수운영과-7454
결재일자	2018.4.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	급수운영과장	서부수도사업소장
김두수	이승영	이병운	04/24 박영헌
협 조

(대흥역~염리동 우체국외 3개소 송배수관 정비공사)

노후송배수관 정비 및 무단수 급수 체계 구축 사업 발주계획 보고

2018. 4. 23.

서부수도사업소

( 급수운영과 )

(대흥역~염리동 우체국외 3개소 송배수관 정비공사)

노후송배수관 정비 및 무단수 급수 체계 구축 사업 발주계획 보고

우리사업소에서 시행예정인 노후송배수관 정비사업 및 중블록 무단수 급수체계 구축 사업 추진에 따른 『대흥역~염리동 우체국외 3개소 송배수관 정비공사』  설계심사를 완료하고 다음과 같이 발주코자 보고 드림.

□ 현  황

○ 공 사 명 : 대흥역~염리동 우체국외 3개소 송배수관 정비공사

○ 공사개요 : 관부설( D=150mm~1,650mm, L=1,134m )

○ 공사기간 : 착공일로부터 6개월간

○ 공사위치 : 대흥역~염리동 우체국외 3개소(위치도 별첨)

○ 총공사비 : ***********************************************

□ 추진내용

○ ’18년 송배수관 정비공사 사업계획 통보 : 2018. 1. 2.

○ 설계도면 심사 : 2018. 1. 30.

○ 설계도면 심사 결과 통보(본부 ⇒ 사업소) : 2018. 2. 28.

○ 설계도서 검토 (사업소 ⇒ 서울시설공단) : 2018. 4. 6.

○ 설계도서 최종 작성완료 : 2018. 4. 12.

○ 설계도서 계약심사의뢰 요청(사업소 ⇒ 본청 계약심사과) : 2018. 4. 13.

※ 계약심사 결과 통보일 : 2018. 4. 23.

□ 계약의뢰 심사 결과 주요 내용

○	설계금액	:	*********	천원
○	심사금액	:	*********	천원
○	절 감 액	:	******	천원
○	절 감 률	:	1.2	%

○ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,502.8원/ℓ → 1,489.8원/ℓ 등 4개 자재 단가 조정

○ 일위대가 조정

- 아스팔트 포장절단 : 표준품셈 적용

- 콘테이너 가설사무실, 창고  : 운반비 제외

- 강관 도장(내·외부) 1,600mm야간 : 표준품셈 적용 등

○ 단가산출서 조정 등

- 굴삭기(브레이커) 조합 조정 : 잡재료비 조정 (22% → 16%)

- 동력분무기 조정 휘발유 7.5L → 1.3L

- 일반관리비 6% → 5.5% 수정 등

□ 발주계획

○ 공사시행 금액                                           (단위:원)

구 분	발 주 금 액	비 고
계	*************	도급비는 심사평가 결과 금액임
도 급 비	*************
관급자재비 등	*************

○ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비

(노후송배수관정비,중블록 무단수 급수체계 구축))

○ 일상감사 의뢰 후 결과에 따라 발주시행하여 송배수관 정비사업 및 중블록 무단수 급수체계 구축 사업 추진에 철저를 기하고자합니다.

붙임   1. 설계심사 결과 통보 공문 1부.

2. 설계심사 검토서 1부.

3. 설계내역서 1부(조정).

4. 위치도 1부.  끝.