문서번호	정수시설과-3711
결재일자	2018.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이승우		유영춘	04/25 이성락
협조

『온실가스 배출권거래제 이행 및 동력비 절감을 위한』

태양광발전설비 설치 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 04

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

『온실가스 배출권거래제 이행 및 동력비 절감을 위한』

태양광발전설비 설치 추진계획

원전하나줄이기 실천 및 신재생에너지보급을 위한 태양광발전설비 설치로 동력비 절감 및 온실가스 감축에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				추진근거

□ 2018년 상수도 태양광발전설비 설치 계획 송부[기전설비과-2178(2018.3.16.)]호

Ⅱ				추진개요

□ 사 업 명 : 태양광발전설비 설치

□ 설치장소 : 탈수기동 옥상

□ 설치용량 : 12kW(모듈300W*40매)

□ 사업예산 : 금34,500천원(설계비-6,597천원,시설비-27,040천원,감리비-863천원)

□ 예산과목 : 에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기, 신재생에너지보급, 공공시설

에너지보급-지역지원 시설비(401-01), 감리비(401-02)

Ⅲ				추진계획

□ 실시설계용역

○ 계약방법 : 수의계약

- 전력기술관리법시행령 제27조 제1항에 의한 전문설계업1종 등록업체

○ 소요예산 : 금6,597천 원(설계비: 3,597천 원, 구조검토비: 3,000천 원)

○ 실시설계내용

- 태양광설비 구조물

- 모듈, 접속반, 인버터설비, 모니터링시스템

- 전기공사(전력간선, 피뢰설비 등)

□ 물품구매설치

○ 계약방법 : 일반공개경쟁입찰

○ 소요예산 : 금27,040천 원

○ 구매설치내용

- 태양광설비 구조물

- 모듈, 접속반, 인버터설비

- 모니터링시스템

□ 전기공사 : 분리발주

○ 전력간선 배관 및 배선

○ 피뢰침 설비

○ 접지설비

□ 공사감리

○ 관련근거 : 전력기술관리법 제12조(공사감리 등)

○ 자체감리 : 전력기술관리법 제12조의 2(감리원의 배치 등)

○ 감리내용

- 설계계도서 검토

- 품질관리·공사관리 및 안전관리 등에 대한 기술지도

Ⅲ				향후계획

□ 2018. 5 : 실시설계용역 발주

□ 2018. 6 : 설계완료 및 기술검토 의뢰

□ 2018. 7 : 계약심사 의뢰

□ 2018. 7~9 : 계약의뢰 및 태양광발전설비 설치.  끝.