투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사 책임건설사업관리기술자
(경유)
제목	설계변경 심의결과 조치계획 승인 통보

1. 종로(감)18-119(2018.4.24.)호와 관련입니다.

2. 종로BRT 및 도로공간 재편 전기공사 설계변경 소위원회 심의 지적사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 승인합니다.

가. 보완사항

- 이윤, 간접노무비 적용요율 수정

- 단가산출서 내용 수정 등

나. 금액변경

구 분	도급비(원)			비고
	계약금액	변경금액	증·감액
심의 전	823,416,000	585,402,000	-238,014,000
심의 후		567,633,000	-255,783,000

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	진종구		녹색성장과장	오삼록		설비부장	04/25 代유병기
협조자
시행	설비부-5536	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8636	/전송	3708-8659	/	jin0652@seoul.go.kr	/	대시민공개