문서번호	산지방재과-4188
결재일자	2018.4.25.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	사면정비팀장	산지방재과장
신정림	정상모	04/25 김영삼
협 조

시민의 숲 교양시설 설치 추진계획

2018.  4.

푸른도시국

(산지방재과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

시민의 숲 교양시설 설치사업 추진계획

우면산 산사태 희생자를 기리고 재난방재의 중요성을 고취시키기 위한

「시민의 숲 교양시설 설치사업」의 전반적인 세부 추진계획을 수립하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공 원 현 황

❍ 공 원 명 : 시민의 숲 근린공원

❍ 위    치 : 서초구 양재동 236번지 일대

❍ 면    적 : 258,991.5㎡

❍ 토지이용계획 : 도시계획시설(공원)

Ⅱ		사 업 개 요

❍ 사 업 명 : 시민의 숲 교양시설 설치사업

❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 7.

❍ 사업내용 : 기념비, 파고라 설치, 수목 이식 및 식재, 안내판 설치

❍ 시설면적 : 110.25㎥

❍ 사 업 비 : 292백만원(2017년도 예산 명시이월)

❍ 공원조성계획 결정(변경) 주요 추진경위

- ’18.  1. 12.: 공원조성계획 결정(변경) 입안계획 수립

- ’18.  1. 18.: 열람공고(서울특별시 공고 제2018-111호)

- ’18.  2. 20.: 제2차도시공원위원회 심의(보류)

- ’18.  2. 20.: 제3차 도시공원위원회 심의(원안가결)

- ’18.  4. 19.: 공원조성계획결정(변경) 및 지형도면 고시

(서울특별시 고시 제2018-120호)

Ⅲ		세부추진계획

❍ 공원조성계획 결정(변경) 실시계획 열람공고 및 고시

- 관련법령 : 국토의계획 및 이용에 관한 법률 제90조 및 제91조

❍ 공사발주

- 공 사 명 : 시민의 숲 교양시설 설치공사

- 공사기간 : 착공일로부터 60일

- 소요예산 : 173백만원

- 계약방법(조경) : 전자공개 수의계약(추정가격 2억원 이하)

- 관련법령 : 지방계약법시행령 제25조제1항

- 입찰참가자격 : 건설기술관리법에 의한 조경공사업 등록 업체

※ 지역제한 : 입찰참가자는 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는     계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재하여야 함

- 하자담보책임기간(조경) : 2년(건설산업기본법 시행령 제30조)

❍ 감리발주

- 용 역 명 : 시민의 숲 교양시설 설치공사 시공감리

- 용역기간 ; 착수일로부터 60일

- 소요예산 : 5백만원

- 계약방법 : 수의계약(추정가격 2천만원 이하)

- 관련법령 : 지방계약법시행령 제30조제1항

**********************************

**************************************************

******************************************************************************************************************

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 2018. 4.30. : 기술용역 타당성 심사 의뢰(→기술심사담당관)

❍ 2018. 5.3.~5.20. : 실시계획 열람공고 및 고시

❍ 2018. 5.~7. : 공사 및 감리용역 시행

❍ 2018. 7.30. : 공사준공 및 공사완료 공고

붙임 : 1. 실시계획 열람공고문(안) 1부.

2. 공사설계내역서 1부.  끝.