문서번호	시설보수과-3376
결재일자	2018.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭		신동헌	04/26 이학구
협조	도로보수과장		강종훈
	주무관		임동운

사천교 성능개선공사 건설폐기물 처리방안 보고

2018. 4

서부도로사업소

(시설보수과)

사천교 성능개선공사 건설폐기물 처리방안 보고

우리 사업소에서 시행하는 「사천교 성능개선공사」의 포장물량 증가로 폐아스콘 등 처리기준 용량 초과에 따른 건설폐기물 처리 방안을 보고드림.

□ 현황 및 문제점

○ 당초 사천교 성능개선공사 예산 사고이월 시 잔여공종의 폐기물 처리량 100톤 미만으로 도급공사에 포함하여 시공사 자체 처리토록 하였으나,

○ 시공사에서 소규모 물량에 대한 폐기물업체와의 계약에 어려움이 있고, 교량 마감포장 시 시민불편 해소를 위한 토공부 포장 불량구간에 대한 추가 도로포장이 필요하다는 현장 실정보고에 의거 폐아스콘(평삭재) 처리량이 증가되어 별도 건설폐기물 처리가 필요함.

구 분	사천교 폐기물 처리량(톤)			비고
	당초	변경	증감
계	88.4	236.3	147.9	100톤 이상 별도 신고처리
폐아스콘	9.2	157.1	147.9
폐콘크리트	79.2	79.2	-

□ 조치방안 검토

○ 폐콘크리트 처리

- 현재 금년도 시설보수과 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역 입찰공고 중으로 5월 중순 용역업체 선정 및 계약 예정임에 따라,

- 사업소 내 임시 적치장에 이동 보관 후 용역업체 계약 즉시 반출 처리

○ 폐아스콘(평삭재) 처리

- 폐아스콘은 물량이 다소 많아 사업소 내 적치장에 보관이 어려우며, 현장(하상) 적치 시 환경문제 등으로 민원이 예상되어 즉시 반출이 필요한 실정임에 따라 ‘도로보수과’ 협조로 「2018년 도로굴착복구공사외 2건 폐아스콘 처리용역」 계약업체에 우선 위탁처리

□ 폐기물처리비 예산 검토 : 약5백만원

○ 폐콘크리트 : 약2백만원

- 용역 발주 설계단가에서 낙찰차액 반영하여 개략금액 산출

○ 폐아스콘(평삭재) : 3백만원

- 도로보수과 용역 계약단가로 산출

※ 폐기물처리비 예산은 5월중 공사 설계변경을 통해 이설비 확보 예정

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 사천교 성능개선공사의 마감포장과 관련하여 우선 처리가 필요한 폐아스콘은 도로보수과의 협조를 받아 폐기물처리하고 추후 관련 예산 품의하여 설계변경 조치코자 하며,

- 2018.4.17. 현장 아스콘 평삭재 114톤 우선 반출 조치

- 2018.4.30. 아스콘 평삭재 약43톤 추가 반출 예정

○ 폐콘크리트는 사업소 임시 적치장 보관, 5월중 시설보수과 폐기물처리용역 업체 계약 후 반출 및 물량정산 처리하고자 합니다.  끝.