문서번호	기전설비과-3417
결재일자	2018.4.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		조성태	04/26 代한희선
협조

우면산가압장 급수체계 개선 공사

관급자재(밸브) 납품기한 연장 계획 보고

2018. 4.

상수도사업본부

【 생산부】

우면산가압장 급수체계 개선 공사

관급자재(밸브) 납품기한 연장 계획 보고

우리 본부에서 시행중인「우면산 가압장 급수체계 개선 공사」를 위해 계약한 밸브의 현장 시공 일정 변경에 따라 납품기한을 연장함

□ 현    황

◯ 계 약 명 : 우면산가압장 흡수정 유출밸브 구매

◯ 사업내용 : 1500A 전동식 버터플라이밸브 2개 구매

◯ 계약금액 : 76,194천원

◯ 계약기간 : 2018.03.02. ~ 2018.05.01.

□ 변경사항

◯ 설치대상 밸브실의 점검구 개량이 필요하여, 당초 5월초 예정이었던 밸브          설치 일정의 연기가 불가피한 상황임.

◯ 계약기간변경  당초 : 2018.03.02. ~ 2018.05.01.

변경 : 2018.03.02. ~ 2018.08.31. (122일 연장)

□ 행정사항

◯ 계약업체 및 관련부서와 변경사항 협의 및 사업일정 조정

◯ 귀책소재 : 우리 본부(향후 유지관리 용이성 검토를 위한 시공일정 조정)

◯ 지체상금 부과여부 : 미부과.

붙임  1. 책임사업관리단 관련 공문  1부.

2. 계약업체 납기변경 합의서  1부.  끝.