문서번호	설비부-5603
결재일자	2018.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
진종구		오삼록	04/25 代유병기
협조

『종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사』

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 04.

설   비   부

『종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사』

설계변경 검토보고

「종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사」관련하여 건설사업관리자로부터 제출된 변경계약 요청건에 대하여 검토하고 보고 드림.

□  공사개요

위    치 : 세종대로 사거리 ~ 동묘앞역

규    모 : 총연장 3.8㎞(버스정류장 15개소)

공사기간 : `17.09.15. ~ `18.04.30.

계약금액 : 823백만원

시 공 사 : 대현산업기술(주)

감 리 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외 1개사

□  관련근거

설계변경 소위원회 심의결과 보고(설비부-5531, `18.4.25)

설계변경 계약 요청(제일2018-1135, `18.4.25)

□  주요 변경내용

구 분		단위	수 량			비 고
			당초	변경	증·감
가로등주 이설		본	-	8	8	신설 횡단보도 구간의 지장물
신호등주 철거		본	47	16	-31	보도확장공사 취소로 물량 감소
신 호 등 설 치	신호등주	본	59	40	-19	보도확장공사 취소로 신호등주 및 부속시설 물량 감소
	신호등(LED)	개	231	116	-115
	잔여시간표시기	개	57	28	-29
	음향신호기	개	57	46	-11
	관로터파기	m	1,315	230	-1,085
중앙차로 전력간선	강제전선관(104㎜)	m	-	184	184	중앙버스정류장내 전력공급설비 설계누락
	케이블(FCV 2C×4㎟)	m	-	1,915	1,915
	쉘터등	본	-	4	4
	관로터파기	m	-	462	462

□  변경금액                                         (상:당초, 하:변경)

품 명	단위	수량	금액(원)	증·감액
종로 BRT 및 도로공간재편 전기공사			823,416,000	-286,987,000
			536,429,000
1. 가로등 이설공사	식	1	4,639,670	-2,925,550
			1,714,120
2. 신호등 철거공사	식	1	50,997,917	-42,870,755
			8,127,162
3. 신호등 설치공사	식	1	457,513,562	-196,231,586
			261,281,976
4. 중앙차로 버스정류장 전기공사	식	1	-	86,228,793
			86,228,793
소 계			513,151,149	-155,799,098
			357,352,051
제 경 비			310,264,851	-131,187,902
			179,076,949
합 계			823,416,000	-286,987,000
			536,429,000

□  건설사업관리기술자 의견

현장여건 변경사항과 설계변경 소위원회 심의결과를 적절하게 반영하였는 바, 상기와 같이 변경 계약함이 타당함.

□  보고자 의견

건설사업관리단의 검토 결과가 타당하여 상기와 같이 변경계약 추진코자 함.

붙임 : (1) 변경 내역서 1부.

(2) 변경계약 요청서(감리단)1부.  끝.