투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
(경유)
제 목	계약심사요청 관련 설계도서 보완제출

1. 시설보수과-2044(2018.04.24)호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 계약심사 요청한 『청계천 좌안 차집관로 물막이 공사』에 대한 설계 도서를 보완하여 제출하오니 심사하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 청계천 조안 차집관로 물막이 공사

나. 공사개요 : □2.4×2.4~2.8×2.8, L=1,108m 물막이, 기타부대공 1식

나. 공 사 비 : 당초 763,400천원 → 변경 776,600천원

다. 공사기간 : 착공일 ~ 2018.11.30

라. 보완사유 : ‘18.03.27자 조달청 제경비 적용기준 개정에 따른 공사비 변경

- 개정대상 : 간접노무비, 산재보헙료, 노인장기요영보험료, 기타경비

붙임 : 설계내역서 1부.    끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	최승룡		시설보수과장	04/25 윤승범
협조자
시행	시설보수과-2071	(		)	접수		(		)
우	04809	성동구 자동차3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	csy21@seoul.go.kr	/	대시민공개