문서번호	설비부-5531
결재일자	2018.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
진종구		오삼록	04/25 代유병기
협조

『종로BRT 및 도로공간 재편 전기공사』

설계변경 소위원회 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 04.

설   비   부

『종로BRT 및 도로공간 재편 전기공사』

설계변경 소위원회 심의결과 보고

「종로BRT 및 도로공간 재편 전기공사」관련하여 설계변경 소위원회 심의결과를 보고 드림.

□  공사개요

위    치 : 세종대로사거리~동묘앞역

규    모 : 버스정류장 15개소(신호등 40본, 전력간선 1식)

공사기간 : `17.09.15. ~ `18.04.30.

계약금액 : 823백만원

시 공 사 : 대현산업기술(주)

감 리 사 : ㈜제일엔지니어링 외 1개사

□  관련근거

심의결과 조치계획 보고 : 종로(감)18-119호(2018.4.24.)

□  심의개요

심의일자 : `18. 4.17(화)

심의장소 : 설비부 회의실

심의위원 : 6명(위원장, 간사, 심의위원 4명)

심의결과 : 조건부 승인(검토의견 보완)

□  지적사항 조치계획

도급비 변경

구 분	도급비(원)			비 고
	계약금액	변경금액	증·감액
심의 전	823,416,000	585,402,000	-238,014,000	심의결과 추가감액 -17,769,000
심의 후		567,633,000	-255,783,000

조치내용

구 분	심의위원 검토의견	조치계획	비고
원가계산서	이윤 계약요율로 적용(15%→13.859%)	계약요율(13.859%) 적용
	간접노무비 요율 수정 · 공사기간 6개월 이상 11.3% 적용	11.6%→11.3%로 적용
내 역 서	제어기 차광막 물량삭제	차광막 물량 삭제
	신호 및 종합시험물량 확인 및 근거자료 제출	근거자료 첨부
	신규공종은 2018년도 서울시 교통신호등 연간단가 적용	2018년도 단가 적용
	일위대가 소수점 이하 버림	소수점 이하 버림
	일위대가와 내역 불일치	불일치 수정완료
	교통정리요원 배치 근거자료 첨부	근거자료 첨부
도 면	신호등 서울시 표준도면으로 작성	표준도면 작성 예정
단가산출서	15호표 접지선 신설 → 철거로 수정	철거로 수정
	28호표 암타이어밴드 · 보통인부 공량 수정(0.058→0.029)	0.029 적용
	33호표 가로등 통합폴 설치 · 내선전공 공량 수정(0.495→0.221)	0.221 적용
	신규공종 자재단가 최저가 적용	최저가 적용

감리 검토의견

도면 및 내역서 등에 대한 소위원회 심의결과 지적사항 등에 대해서 모두 적정하게 보완하였음.

□  보고자 의견

내역서 도면 등에 대한 설계변경 소위원회 심의결과를 모두 반영하여 수정·보완하였는 바, 변경사항을 승인하고 계약변경 추진코자 함.

붙임 : 감리보고서 1부.  끝.