투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청(진접선차량기지 건설공사 설계단계 건설사업관리용역)

1. 도시철도계획부-3419(2018.4.19.)호와 관련입니다

2. 우리 부에서 시행중인「진접선차량기지건설공사 설계단계 건설사업관리 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 진접선차량기지 건설공사 설계단계 건설사업관리용역

2) 용역기간 : 2015.12.15.~2018.4.30.(2차 : ’16.3.15~’18.4.30)

3) 계약금액 : 1,082,483,000원(2차 875,461,000원)

4) 계 약 자 : ㈜동일기술공사 대표 김수보 외 5개사

나. 준공기한 연기 내역

구분	당초	변경
총차	2015.12.15. ~ 2018. 4.30.	2015.12.15. ~ 2018. 7.31.
2차	2016. 3.15. ~ 2018. 4.30.	2016. 3.15. ~ 2018. 7.31.

다. 연기사유 : 기본 및 실시설계용역 준공기한 연기에 따라 설계단계 건설사업관리 용역 준공기한 연기

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	도시철도계획부장
주무관	최원혁		도시철도설계과장	이명수		도시철도계획부장	04/25 김진팔
협조자	경리과장	代김용범
시행	도시철도계획부-3525	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 10층	/
전화	02-772-7141	/전송	02-772-7304	/		/	부분공개(5)