＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	계약사항 변경(납품기한 연기) 요청

1. 기전설비과-3417(2018.4.26.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진중인 ‘우면산가압장 급수체계 개선공사’에 소요되어 조달구매 의뢰하여      계약된 밸브 구매건의 계약기간을 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

---------------------    아      래    ---------------------

◼ 계 약 명 : 우면산가압장 흡수정 유출밸브 구매

◼ 조달납품 요구번호 : 12-18-1-14822-00

◼ 계약금액 : 금76,194,880원

◼ 계약대상 : ㈜현대밸브 (대표 : 최호정)

◼ 변경사항 : 계약기간 연장

- 당 초 : 2018.03.02. ~ 2018.05.01.

- 변 경 : 2018.03.02. ~ 2018.08.31. (122일 증)

◼ 귀책소재 : 우리 본부(밸브실 유지관리 용이성 검토를 위한 시공일정 조정)

붙임  1.계약기간 연장 보고서 1부.

2.계약변경 합의서      1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	이상록		기전설비과장	04/26 조성태
협조자
시행	기전설비과-3448	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	부분공개(5)